문서번호	건축부-19766
결재일자	2017.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	건축관리과장	건축부장		시설국장
송옥의	차무흥	김진용		전결 11/16 류훈
협 조

『서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)』

총차분(3, 4차분) 공기연장 검토 보고

2017. 11.

도시기반시설본부

건 축 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울역 7017프로젝트 건설공사(건축)』 총차분(3,4차분)공기연장검토보고

「서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)」에 대한 3, 4차분 추가공사의 공사기간연장 신청서 검토 보고임

1		공사개요

공 사 명 : 서울역 7017프로젝트 건설공사(건축)

위    치 : 서울역 고가도로(서울 중구 남대문로 5가 527~ 만리동 1가 62)

규    모 : 고가진입용 승강기 구조물 5개소, 에스컬레이터 구조물 1개소, 고가하부 편의시설 4개동, 고가 상부 편의시설 14개동

서울역파출소 신축 1개동, 서울역희망지원센터 보수

공사기간 및 계약금액

구 분	변 경 후	공사기간	비 고
총차	8,774,936,930	2016.5.26. ~ 2017.11.21
1차	2,970,830,270	2016.5.26. ~ 2017. 4.26	2017.4월 준공
2차	451,083,760	2016.5.26. ~ 2017. 4.26	2017.4월 준공
3차	2,963,228,900	2016.4.26 ~ 2017.11.21	금회변경
4차	2,389,794,000	2017.9.01. ~ 2017.11.21	금회변경

시 공 사 : 금성종합건설주식회사

설 계 자 :  ㈜종합건축사사무소 디자인캠프 문박디엠피

감 리 자 : MOB종합건축사사무소

2		추진경위

‘16. 05. 27 : 공사착공     ‘17. 04. 26 : 1차, 2차준공

‘17. 08. 31 : 총차 공사기간 연장(2017.10.21. → 2017.11.2

‘17. 10. 19 : 3차공사 기간연장(2017.10.21. → 2017.11.21)

3		공사기간 변경 내용

관련근거 및 변경내용

[3차분]

- 고가상부 편의시설 캐노피추가공사 외 7건 추가공사 요청

※ 서울로운영단-4763(2017.11.06.)

- 희망지원센터 외장재변경 공사 요청

※ 자활지원과-14093(2017.10.31.)

[4차분]

- 파출소 추가공사(내부 민원대 추가 및 인테리어 공사 등 추가)

※ 남대문 경찰서 경무과-9592(2017.08.30.)

- 파출소 신청사 이주기간 소요, 임시파출소 철거, 부지원상복구 등 공사일정 추가 소요

계약금액 변경 사항 : 없음 (추후 변경)

공사기간 연장 내용

구 분	공 사 기 간 연장			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 감
총차	2016.5.26. ~ 2017.11.21	2016.5.26. ~ 2017.12.31	+40
3차	2017.2.24. ~ 2017.11.21	2017.2.24. ~ 2017.12.31	+40
4차	2017.9.1. ~ 2017.11.21	2017.9. 1. ~ 2017.12.31	+40

4		처리의견

추가공사 시행을 위하여 공사기간을 연장하고자 함.

따로붙임 : 공사기간 연장요청서 1부. 끝.