문서번호	디자인정책과-12503
결재일자	2017.11.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공공미술사업팀장	디자인정책과장		문화본부장
박재은	한재훈	변서영		11/16 서정협
협 조

청파로 퍼블릭 아트캔버스 작품 설치

용역계약 변경계획

2017. 11.

문화본부

(디자인정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

청파로 퍼블릭 아트캔버스 작품 설치

용역계약 변경계획

작품이 설치된 청파로 옹벽부 주변 환경 정비를 통해 시민의 편안하고 안전한 작품 감상환경을 조성하고, 화면의 1/3을 가로막고 있는 노후한 펜스를 교체하고자 용역 업체와의 계약금액 및 준공일자를 조정하고자 함

(※지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준-행자부 예규 제 35조 관련)

1		추 진 개 요

사업개요

○ 사 업 명 : 청파로 퍼블릭 아트 캔버스(만경청파도(萬景靑坡圖)

○ 설치장소 : 경부선 서울역(서부역) 인근 상행선 방향 철도 옹벽 185m

○ 계약대상 : ********

○ 계약금액 : 금169,884,000원(금일억육천구백팔십팔만사천원정)

○ 계 약 일 : 2017년 9월 12일

○ 착 수 일 : 2017년 9월 12일

○ 준 공 일 : 2017년 12월 15일

*******************************************

추진경위

○ 한국철도시설공단 협의 및 시행 확정 : ’17.6.8.

○ 제안서 심사 및 업체 선정 : ’17.8.23.

○ 공공미술 자문회의 착수보고 : ’17.9.6.

○ 주민 인터뷰 및 자료 수집 : ’17.9.1~9.30.

○ 옹벽 보수공사 완료 및 벽화 행위신고 : ’17.10.19

○ 공공미술 자문회의 보고 및 도안확정 : ’17.10.25.

2		변 경 검 토

변경내용

○ 변경 대상 : 과업추가에 따른 계약금액 증액, 계약기간 연장

구분	당초	변경	비고
과업내용	작품 기획 및 설치	*********** ****************	******
계약금액	169,884,000	***********	************
계약기간	’17.9.2~12.15	*************	***********

변경사유

○ 펜스 교체공사 : 작품 관람환경 개선과 보행자 안전성 강화

-  작품 입면 전체의 1/3을 가리고 있는 노후한 스테인레스 펜스 제거

-  서울시 우수 공공디자인 인증을 받은 펜스 설치로 경관 개선과 작품 시안성 확보

-  작품 확장 시 연결된 구간에 일관된 경관 유지를 위하여 전체 구간(404m) 교체

<당초 설치된 펜스>	<새로 설치되는 펜스>

○ 펜스 공사로 인한 계약 기간 연장 : 5일 연장

- 작품 설치기간을 활용하여 펜스 및 조명시설 정비를 병행하여 공기 단축

○ 합의사항 : 작품 설치 기간과 연계하여 추진

-  작품 전체 설계와 시공에 연결하여 작품 관람환경 개선 과업을 함께 추진

-  공사과정에서 작품 훼손문제를 방지하고 최종적으로 정돈된 경관으로 정비

3		행 정 사 항

********

*******************************

**********************

***********************************************************************************************************************************************************************

***********************************************************************************

향후계획

○ 작품 설치 작업 : ’17.11.2~11.20

○ 제작완료 및 오픈행사  : ’17.11.24(안)

○ 펜스 구매 및 현장 설치 : ’17.12.1~12.8 (7일간)

협조사항

○ 설치기간 연장에 따른 행위신고 승인 : 용산구청, 용산 경찰서

○ 작품 설치 옹벽관리 : 한국철도시설공단, 한국철도공사 (수도권본부)

○ 계약 변경 협조 : 재무과