의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-24018
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		광역도로과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
박현희		진재섭	김영수	류훈	11/17 고인석
협 조
	주무관				박상철

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 1695번, 진두생 의원, 환경수자원위원회)

따로붙임 :  시의원 요구자료 1부.  끝.

진두생 의원(환경수자원위원회, 자유한국당)

○ 구로구 개봉1동 남부순환도로

- 평탄화사업 일자별 세부적으로 진행과정

- 설계변경 있으면 그 사유?

□ 평탄화사업 일자별 진행과정

○ '09.03.30. ~ '10.05.26. : 타당성조사 및 기본계획 용역

○ '10.06.03. ~ '11.10.31. : 기본설계 용역

○ '12.06.14. : 주민설명회

○ '13.02.15. : 실시설계 준공('11.12.22. 착수)

○ '15.11.~'16.07. : 보상시행(15필지 167㎡)

○ '16.03.25. : 공사착공

○ '16.07.13.~16.08.31. : 주민설명회 개최(8회)

○ '17.04.17. : 오류IC 우회도로 가설교량(사당방향) 개통

○ '17.05.26. : 본선부 좌측 종배수관 터파기 및 관부설

○ '17.06.03. : 오류IC 기존교량(사당방향) 거더인양 및 철거

○ '17.11. 현재 : 오류IC교 가시설 및 본선부 종배수관 가시설 설치

□ 설계변경 내역 및 그 사유

(금액단위: 백만원)

** ** ****	****		****			*******
	**	**	**	**	***
1	’16.3.25. ~’19.3.24.	변경 없음	15,445	16,118	(증)673	○설계누락분 반영 ○현장 여건변경에 따른 증감사항 반영
2			16,118	16,690	(증)572	○민원에 따른 요구사항 반영 ○물가변동으로 인한 계약금액조정

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 도시기반시설본부 (시설국 토목부)	담당사무관	진재섭
	☎ 02-3708-2558	담당자	박현희
	작 성 일 : 2017.11.16.