문서번호	토목부-24037
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목총괄과장	토목부장		시설국장
이상욱A	이동훈	김영수		11/17 류훈
협 조	공원시설과장		김인숙
	주무관		박웅교

**************

********************

2017. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

**************

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」와 관련하여 책임건설사업관리기술자**************************.

1		관련근거

▢ *********************************************************

2		공사개요

▢ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사

▢ 공사위치 : 중구 남대문로5가 527~만리동1가 62

▢ 공사규모 : 고가도로 보수·보강, 그린웨이 조성 등 : B=10.3m, L=938m

바닥판 재설치(본선) : B=10.3m, L=516.5m

▢ 공사기간 : 2016. 4.18. ~ 2017.11.21.

▢ 도 급 비 : 금32,345,500천원

▢ 시 공 사 : 홍익산업개발(주)외 1개사

▢ 감 리 사 : ㈜진우엔지니어링외 3개사

3		*****검토

▢ ***********

********************************************

******************                              ***********

***	*****			*******	***
	***	*****	*	******
**	**********	**********	******	**********************
**	**********	**********	******	**********************

***********                                      ************

연번	제 목	변 경 사 유	공사비 증-감	비 고
1	교량점검시설 (P25)	P25 교각 상단부의 메인 배관 열선 분전함 점검이 가능한 승강 사다리 및 검검 통로 시설 설치비 반영	9.5	2017.11.08 토목부-23241
2	받침장치 연결부 보강	철도구간 교좌장치 교체에 따른 기존 볼트홀 보강 공사비 반영	4.6	2017.11.14 토목부-23760
3	품질관리차량비 정산	공사기간 연장에 따라 품질관리를 위한 차량운행비용의 정산반영 (당초 13개월 → 변경 19개월)	4.1	정산변경
4	덩굴식물지지대 수량 정산	덩굴식물지지대(포도나무) 수량정산 및 명칭오류 수정 반영	0.5	정산변경
5	매설형 와이어지주 수량 정산	매설형 와이어지주 수량 오류 수정 반영(만리동 교통섬)	1.8	정산변경
6	계단 수량 정산	만리동 공원 계단 수량 정산 반영	-2.2	정산변경
7	아스팔트 및 콘크리트 깨기 수량 정산	아스팔트 및 콘크리트 깨기 수량 정산	-17.6	정산변경
8	현장사무실 임대료 정산	공사기간 연장에 따라 현장사무실 임대료 정산반영 (당초 13개월 → 변경 19개월)	22.0	정산변경
9	설계자문경비 정산	설계자문(디자인 감리)경비 정산 반영	5.5	정산변경
10	간접노무비외		0.7	정산변경
계			28.9

************

공 종	단위	수 량		증 ․ -감	비 고
		당초	변경
교량점검시설	ea	22	23	1
받침장치 연결부 보강	식	-	1	1
품질관리차량비	개월	13	19	6
덩굴식물지지대	개소	21	22	1
매설형 와이어지주	조	163	193	30
계단(만리동광장)	개소	4	2	-2
아스팔트깨기	㎥	6,646	3,318	-3,328
콘크리트 깨기	㎥	1,914	2,988	1,074
현장사무실(임대)	개월	13	19	6
설계자문경비	식	1	1	-

************                                       ************

구 분	단위	금 액		증 ․ -감	비 고
		당초	변경
1.교량공사	식	13,874,702	13,900,506	25,804
2.조경공사	식	6,149,357	6,123,534	-25,823
3.인포가든공사	식	602,651	602,651	-
4.보도환경개선공사	식	1,955,967	1,955,967	-
소 계		22,582,677	22,582,658	-19
현장사무실(임대)	식	39,000	61,000	22,000
설계자문경비	식	164,703	170,190	5,487
제경비	식	9,559,120	9,560,582	1,462
도급공사비		32,345,500	32,374,430	28,930

4		조치의견

❍ ********************************************************************************************.

붙  임 : 1. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

************* 끝.