문서번호	문화체육과-35126
결재일자	2017.11.27.
공개여부	대시민공개

주무관	책읽는성북담당	문화체육과장	복지문화국장		부구청장	구청장
김나정	장희석	장순봉	손정수		김병환	11/27 김영배
협 조	홍보전산과장			유인욱
	행정지원과장			하순호
	건축과장			임철수

성북구청 12층 도서관(가칭) 조성 운영 계획

2017. 11.

복지문화국

문화체육과

성북구청 12층 도서관(가칭) 조성 운영 계획

『책 읽는 성북』 걸어서 10분 우리 마을 도서관 만들기 정책의 일환으로 구청12층을 지역특성에 맞게 행정자료를 제공하고 성북의 역사·문화·인물·사진 자료들을 축적하여 서비스를 시행하여 구민과 함께하는 공공 도서관으로의 역할을 수행하고자 함

Ⅰ		추진배경

동선·보문·삼선·안암지역 주민들의 공공도서관 부재에 따른 상대적불편함 부분해소

지역주민에게 북카페로 개방된 구청12층을 도서관으로 조성화여주민 서비스 기능 확대

구청내에 조성되는 도서관으로 지역주민을 대상으로 한 행정정보서비스 특화

Ⅱ		추진근거

도서관법 제27조(설치 등) 및 제29조 (공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

서울특별시 성북구 도서관 설치 및 운영에 관한 조례 제4조의2 (구의 책무)

구청장 지시사항(2017.11.4. 구립도서관과 지역사회 협력 자문회의시)

Ⅲ		사업개요

위   치 : 성북구 보문로 168(구청12층 북카페)

규   모 : 176.6㎡(약 54평)

사업기간 : 2017. 10 ~ 2018.2

소요예산 : 180,000천원

Ⅳ		현황분석

봉사인구현황

봉사영역(성북구청 반경 1㎞)

출처:도서관건립계획지원시스템

봉사인구(반경 1㎞ 이내 총 28,654명)

연령별 인구분포는 20대 ⇒ 30대 ⇒ 60세이상 ⇒ 40대 순(順)

그 외 구청방문자 및 근무자가 주요 도서관 이용자일 것으로 예상됨

Ⅴ		추진계획

계획수립		◦ 12층 도서관 운영 계획 수립 ◦ 동행인터뷰 진행		2017년 10월~11월
□
내부인테리어 발주 및 공사		◦ 내부 인테리어 설계 계약 및 공사·준공		2017년 11월∼ 2018. 1월
□
인력충원		◦ 실무 직원 구성		2017년 10월∼11월
□
도서구입 및 기타 물품 구입		◦ 도서 구입 및 비치 ◦ 도서관 시스템 구축 ◦ 기타 물품 구입		2018년 1월∼ 2018년 2월
□
개 관		◦ 시범 운영 및 개관식 개최		2018년 2월

Ⅵ		세부추진계획

□ 도서관의 종류	작은도서관(도서관 조성 후 구립도서관으로 운영)

도서관법 시행령제3조(도서관의 시설 및 도서관자료)

시   설 : 건물면적 33㎡이상, 열람석 6석 이상

□ 규모 및 공간 구성

도서관자료 : 1,000권이상

1층 (176.6㎡)		커뮤니티 Zone : 독서동아리, 마을 공동체 모임 공간 성북구 자료 Zone : 성북구 역사, 인물, 문화 등 자료 구축 행정자료 Zone : 구청방문자의 특성을 살린 행정자료 특화 코너 운영

□ 운영계획

도서관 운영 방향

12층 북카페를 리모델링 하여 전세대가 자유롭게 이용하며 소통하고, 자료 및 정보 공유, 커뮤니티 중심의 공간으로 구성

지역특성과 구청방문자(어린이장난감도서관, 북코너, 구청민원 등)를 고려하여 어린이, 신간, 잡지, 행정자료 중심으로 자료 구축

적극적인 행정자료 수집을 통하여 지역주민과 공무원을 대상으로 한 정보서비스 시행

성북구의 역사, 문화, 인물, 사진 자료 등을 전자화 하여 서비스

12층에 위치한 전경(view)을 살린 트인 느낌의 공공도서관 조성

도서관 운영 위탁 : 성북문화재단

※ 서울특별시 성북구 도서관 설치 및 운영에 관한 조례 개정(2018년 2월 중)

인력계획(배치인력 3명)

개관 전 : 사서 2명 배치

- 개관준비 : 2017. 10. ~ 2018. 2.

- 사    유 : 동행인터뷰 진행(중), 내부 시설 공사 및 시스템 구축, 장서 이관 및 구매 등

개관 후 : 보조인력 1명 배치

사업비 : 180,000천원

구 분	구 청		비 고
시 설 비	75,000	내부시설 설계용역 및 공사	-
자산취득비	50,000	자료관리시스템	-
도서구입비	50,000	도서·비도서 구입
사무관리비	5,000	사무용품 등 구입	-
총 계	180,000

사업비 내역                                             [단위:천원]

도서관 명칭 : 추후 운영 방향에 맞게 명칭 공모 후 선정

Ⅶ		향후계획

성북구립도서관 조성 TF팀 운영 : 2017. 10. ∼ 완료시

도서관 명칭 공모 및 홍보 : 2017. 11. ∼ 12.

내부 인테리어 설계 용역 및 공사 : 2017. 11. ∼ 2018. 1.

도서관 운영 시스템 구축 및 서가·도서·비품 구입 : 2018. 1. ∼ 2.

도서관 개관 : 2018. 2.

Ⅷ		행정사항

건  축  과 : 도서관 내부 인테리어 및 시설 공사 협조

기획예산과 : 추경예산 및 출연금(성북문화재단) 편성 협조

동선·보문·삼선·안암주민센터 : 새마을문고 연계 및 개관 홍보 협조

성북문화재단 : 도서관 위탁 운영 및 근무 인력 사전 채용 및 배치, 운영비 편성, 전산 관리 지원, 개관 준비 등

붙 임 : 12층 도서관 도면 1부.  끝.