문서번호	조경과-6749
결재일자	2017.11.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	조경과장
강명희		김효준	11/29 강인호
협조

「식물표본전시관 전시연출용역」설계변경 시행 계획

2017.  11.

(조경과)

「식물표본전시관 전시연출용역」설계변경 시행 계획

「식물표본전시관 전시연출용역」추진과 관련 실정검토 보고 등 현안사항에 대하여 아래와 같이 종합 검토하고 설계변경을 시행하고자 함.
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ		사 업 개 요

□ 건    명 : 서울대공원 식물표본전시관 전시연출 용역

□ 기    간 : 2017. 4. 13 ~ 11. 30

□ 위    치 : 서울대공원 식물표본전시관 1층(512㎡)

□ 내    용 : 제1․2표본전시실 및 북카페 내 전시장치물 및 설명패널 제작․설치

□ 계약금액 : 86,000천원

□ 계 약 자 : ㈜인아웃에스씨 대표 이정수

입구	A 전시실	B 전시실	식물도서관

Ⅱ		변경내용검토

□ 관련근거

○「식물표본전시관 전시연출용역」실정검토 보고 : 조경과-5650(2017.10.12.)

- 서울대공원식물원 자체 보유식물표본의 노후로 전시적 가치가 낮아 전시 콘텐츠 확보 우선 필요

- 국립수목원의 협조로 확보된 식물표본을 진열장 내 나열식 배치가 아닌 이야기가 있는 식물표본으로 전시하기 위하여 새로운 전시시설 및 콘텐츠 구상 필요

- 벽체마감 공사를 위한 추가 예산 발생이 불가피하여 현 계약금액 내 용역진행을 위한 과업범위 축소 필요

□ 주요 변경내용

구분		당 초	변 경	비 고
과업 범위	공간적 범위	○ 식물표본전시관 1층 제1·2표본전시실 및 북카페(512㎡)	○ 식물표본전시관 1층 제1표본전시실 및 북카페(208㎡)
	내용적 범위	○ 제1,2표본전시실 내 진열장 및 설명패널 제작ㆍ설치 ○ 북카페 내 가구 제작ㆍ설치	○ 제1표본전시실 벽체마감공사, 진열장 및 설명판 제작ㆍ설치 ○ 북카페 일부 벽체마감공사 및 가구 제작ㆍ설치

□ 변경세부내역 : 붙임

Ⅲ		조 치 계 획

□ 위 보고한 바와 같이 본 전시연출용역에 대하여 설계변경 시행하고자 함

붙임 : 설계변경내역서 및 실정사항 검토보고서 각 1부.  끝.