준공기한 연기 의뢰서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사

나. 도 급 자 : 미래종합조경(주) 주정수, ㈜신영그린시스 심재홍

다. 계약금액 : 금2,377,213,000원

라. 당초기간 : 2012.12.27 ~ 2014. 4.30

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014. 5. 29

나. 연기사유 귀책소재 : 서울대공원

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ ‘호랑이숲 전시물 제작설치 공사(공사기한 5.29일)’ 완료 후 재개장 예정이며 - 개장 전 동물적응 기간 중 수목 및 시설물 관리‧보완을 위해  연기 필요

2014년  4월  25일

조 경 과 장     이 성 주 (인)

서울대공원(분임)경리관 귀하