투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	백두산호랑이숲 조성공사 준공기한 연기 시행

1. 조경과-2316(2014.4.26)호와 관련입니다.

2. 노후된 호랑이사를 서식지 생태환경으로 정비하는 『백두산호랑이숲 조성공사』의 준공기한 연기을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사(장기계속공사)

나. 공사내용 : 호랑이방사장 확장, 내실보수, 기반시설 정비 등

다. 공사기간 : 2012.12.27 ~ 2014. 4.30

라. 도 급 액 : 총2,377,213,000원 (1차분 856,198,330원, 2차분 1,521,014,670원)

마. 도 급 사 : 미래종합조경(주) 주정수, ㈜신영그린시스 심재홍

바. 내역변경 : 해당없음

사. 준공기한 연기 : 2014. 5. 29일까지 (연기사유서 별첨)

붙임  1. 준공기한 연기서 1부

2. 검토보고서 1부.  끝.

주무관							조진성				주무관					윤희숙					조경과장					이성주					관리부장						정상택
서울대공원장							04/28 안영노
협조자				총무과장							이경로
시행			조경과-2353										(						)		접수												(						)
우	427-702					경기도 과천시 대공원광장로(막계동) 102																/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02)500-7511							/전송			02)500-7993					/	jsjo@seoul.go.kr													/	대시민공개