문서번호		공원녹지과-9097		★주무관		공원팀장		공원녹지과장		도시관리국장
결재일자		2017.12.1.
				김응주		이병호		김운식		12/01 이동일
공개여부		대시민공개
				협 조	재무과장		김영모
보도여부
					예산팀장		전혜정
					계약팀장		남정우
	- 오동근린공원 재활용선별장 테니스장 조성사업 - 사업비 사고이월 계획
2017.12.1.
도시관리국

- 오동근린공원 재활용선별장 테니스장 조성사업 -

사업비 사고이월 계획

2017년 제2회 추가경정예산으로 배정된 오동근린공원 재활용선별장 테니스장 조성사업 추진을 위한 기간이 부족하여 2017년 회계연도 내 예산 집행이 어려워 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

기획예산과-14219호(’17.09.12) ‘201년 제2회 추가경정예산 확정 알림’

지방재정법 제50조 및 같은 법 시행령 제58조(세출예산의 이월)

서울특별시 강북구 재무회계규칙 제27조(이월예산의 집행)

Ⅱ		사업개요

위    치 : 강북구 번3동 115-10 오동근린공원 재활용선별장 상부

사업내용 : 오동근린공원 조성계획 변경 및 테니스장 조성 실시설계

사업기간 : 2017.10. ∼ 2018. 2.

배정금액 : 40백만원 (구비)

배정일자 : 2017. 9. 8.

Ⅲ		추진경위

강북구 2017년 제2회 추가경정예산 확정	’17.09.12.

공원조성계획 변경 및 설계용역 착수	’17.10.16.

테니스장 조성 관련 관계자 회의	’17.11.15.

오동근린공원 조성 변경계획 수립	’17.11.20.

공원조성계획 결정(변경) 열람공고 및 관련부서 협의	’17.11.23.

Ⅳ		사고이월 계획

예산현황                                                   (단위 : 원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	예 산 액 (A)	집 행 액 (B)	사고이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
계		40,000,000	15,200,000	18,924,000	5,876,000
오동근린공원 재활용선별장 테니스장 조성사업	시 설 비	40,000,000	15,200,000	18,924,000	5,876,000

예산과목 : 공원녹지과, 도시공원 이용공간 개선, 도시공원관리, 오동근린공원

재활용선별장 테니장 조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비

사고이월액 : 18,924,000원

사고이월 사유

본 사업은 오동근린공원 재활용선별장 상부 유휴공지에 테니스장을 조성하기 위해 2017년 제2차 추가경정예산을 확보하여 공원조성계획 변경 및 테니스장 조성 설계용역을 진행 중으로,

공원조성계획 변경을 위한 관련기관 협의 및 서울시 도시공원위원회 심의 등 사전절차 이행에 필요한 기간과 테니스장 조성을 위한 실시설계 기간이 필요하여 2017년 회계연도 내 집행이 불가능하므로 사업비를 사고 이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅴ		향후계획

2017.12. : 사고이월 요청(기획예산과)

2017.12. : 서울시 도시공원위원회 심의

2018. 1. ~ 2. : 공원조성계획 결정(변경) 고시 및 용역 준공

붙 임  1. 사고이월명세서 1부.

2. 용역계약서 1부.  끝.