문서번호	시설보수과-3091
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	북부도로사업소장
이훈욱	정재현	04/29 이승진
협 조
	관리단속과장		정수현

준공기한 연기 검토 보고 (북악스카이웨이1교 정밀안전진단용역)

2014. 4

북부도로사업소

(시설보수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

준공기한 연기 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인 『북악스카이웨이1교 정밀안전진단 용역』에 대하여 용역사로부터  준공기한 연기 신청이 접수되어  이에 대한 검토 보고임.

공사개요

○ 용 역 명 : 북악스카이웨이1교 정밀안전진단용역

○ 용역개요 : 교량  B=8.35m, L=60m

○ 용역기간 : 2013년 12월 23일 ~ 2014년 4월 30일

○ 계약금액 : 47,046천원

○ 용 역 사 : 에스큐엔지니어링(주)

보고내용

○ 정밀안전진단 용역 준공기한 연기 신청(2014. 4. 29)

- 준공기한 연기사유

· 최종보고회(2014.4.22.)결과 대책방안에 제시에 대한 자문의견 중 추가검토가          요구되는 사항이 발생되어 준공기한 연기 신청

- 연기요청 일수 : 30일 (용역사의 요청에 의한 연기)

․ 용역기간 : 당초 2013.12.23 ~ 2014.4.30  →  변 경 : 2013.12.23 ~ 2014.5.30

검토결과

○ 최종보고회 결과 제시된 의견에 대한 추가 검토로 준공기한 연기가 불가피하여 용역사 요청대로 준공기한 연기코자 함.

조치계획

○ 관리단속과로 준공기한 연기조치 의뢰

○ 준공기한 연기 내용

- 당초 2013.12.23 ~ 2014.4.30  →  변 경 : 2013.12.23 ~ 2014.5.30

○ 연기사유 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 :  용역사 준공기한 연기 요청서 1부.  끝.