투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(한강이촌권역 자연성회복사업 폐기물처리용역)

1. 생태공원과-3331(2017.12.05)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 발주하여 시행중인“한강이촌권역 자연성회복사업 폐기물처리용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한강이촌권역 자연성회복사업 폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2016.3.22 ~  2017.12.10

다. 용역금액 : 354,398,700원

라. 계 약 자 : 더블유아이케이환경(주) 대표이사 김기수

마. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경
용역기간	2016.03.22. ~ 2017.12.10	2016.03.22. ~ 2017.12.27

바. 연기 귀책소재 : 한강사업본부

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 준공기한연기요청 1부.

4. 준공기한연기검토내용1부.

5. 용역기간 연장요청서1부.끝.

	생태공원과장
주무관	김태수		생태공원과장	12/06 최병언
협조자
시행	생태공원과-3337	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	3780-0859	/전송	3780-0745	/	k333331@seoul.go.kr	/	대시민공개