하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	2017.1차 국민임대주택 당첨자 발표 등 일정 연기

1. 사장방침 제789호(2017.08.08.) “2017년 제1차 국민임대주택 공급계획(안)”과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 2017년 1차 국민임대주택의 행정정보공동이용시스템 및 사회보장정보시스템을 통한 소득 및 자산조회 회신이 당초 예정보다 늦어져 당첨자 발표 및 추후 일정을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

-   아           래   -

공급절차	기존 일정	변경 일정
당첨자 발표	2017. 12.7(목)	2017. 12.13(수)
계약체결	2017. 12.26. (화) ~ 2017. 12. 28.(목)	2018.1.3.(수) ~ 2018.1.5.(금)
일정 변경 사유	사회보장정보시스템(범정부) 내부 업무처리규정상 소득 및 자산조회를 일주일에 1번씩만 의뢰함(일주일동안의 자료를 모아서 매주 화요일마다 일괄 조회의뢰) 금융재산 조회기간이 5주 이상 소요되어 공급일정에 차질 발생
변경안내문	금융자산을 포함한 소득 및 자산 조회기간이 예상보다 초과되어 소명사항 확인 등의 일정에 차질이 생겨 당첨자발표일이 2017.12.7.(목)에서 2017.12.13.(수) 15:00 로 연기되며 계약체결일 역시 2018.1.3.(수)부터 2018.1.5.(금)으로 연기됩니다.

붙임  국민임대주택공고문_게시용.  끝.

부 원						파트장				공공임대부장			주거복지기획처장		12/06
		서윤나						배경수			주홍석			서종균
협조자

시행			공공임대부-6786				(2017.12.06)			접수				()
방침번호
우	135-988			서울시 강남구 개포로 621								/
전화		02-3410-7785			전송	02-3410-7793		/	syn@i-sh.co.kr					/	공개