문서번호	산지방재과-13676
결재일자	2017.12.11.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
신정림		정상모	12/11 김영삼
협조

’18년 산사태 예방사업 설계심의(2차) 결과보고

2017. 12.

푸른도시국

(산지방재과)

’18년 산사태 예방사업 설계심의(2차) 결과보고

’18년 산사태 예방사업 설계와 관련 적정한 공법 선정 등에 대한 외부 전문가 합동 설계심의 결과(2차)를 보고 드림

Ⅰ		심의 개요

□ 일    시 : ’17. 12. 6(수) 14:00 ~ 18:00

□ 장    소 : 무교별관 9층 회의실

□ 심의대상 : 8개소

❍ 도봉구(1), 광진구(3), 금천구(1), 강동구(1), 서울대공원(2)

□ 심의참석자

❍ 산지방재과 : 사면총괄팀장, 사면관리팀장, 사면정비팀장, 안규홍 주무관

❍ 외부전문가 : 3명

- 송  훈(수성ENG, 토질 및 기초기술사)

- 이석민(서울연구원, 지질박사)

- 지기환(대원기술사사무소, 산림기술사)

❍ 자치구 사업담당 팀장, 주무관, 설계자

Ⅱ		심의 결과

□ 심의결과 : 조건부채택(5개소), 재심의(3개소)

□ 심의내용

연번	기관명	위 치		사업개요	심의의견(지적사항)	심사 결과
		동	지 번
1	도봉구	방학동	산78	- 계류보전 - 골막이 3, 바닥막이 4, 기슭막이 106.4㎡ , 집수정, 벤치플륨관 28m 등	·사면의 안정성을 고려하여 수로공사, 선별적인 위험수목 제거 철저 ·집수정 규모, 시설물 상세도 (물뺴기공 등), 명칭 재검토 ·의견수렴, 사전절차이행 철저	조건부채택
2	광진구	중곡동	143- 132	-사면정비 -골막이 12, 기슭막이 116.7㎡ , 깬돌수로 228m,편책124m 위험수목 제거 등	·위험요인(낙석에너지,지하수 등) 재분석 검토 후 안정성 제고를 위한 계획(공법)수립 ·식재계획 검토하여 경제성 제고 요망 ·위험수목 제거 철저 등	재심의
3	광진구	중곡동	176- 117	-사면정비 -낙석방지망752.4㎡, 낙석방지휀스 및 측구수로214m, 집수정 등	· 암반사면해석, 지하수 등 검토하여 안정성 제고 요망 ·낙석방지망과 낙석방지휀스 중복시설 재검토 등	조건부채택
4	광진구	중곡동	143- 141	- 사면정비 -토사절취,식생토낭쌓기52.5㎡, 목책 40m,con’수로 49m, 식생매트 164.9㎡,	·사면안정성 검토결과에 의한 보강대안 비교검토, 안정성 제고를 위한 계획수립 ·장기적인 안정성 확보위해 배수현황 조사 및 배수시설 설치방법 등 검토 필요	재심의
5	금천구	시흥동	산138-2	- 계류보전 - 골막이 3, 기슭막이 84m, 바닥막이 4, 집수정 등	·경제성 제고를 위한 유량, 통수단면 등 재검토 필요 ·침사지 재활용 방안, 골막이 등 시설물의 적정성 검토	조건부채택
6	강동구	둔촌동	산12	- 계류보전 골막이5,기슭막이 140m, 위험수목 제거 등	·경제성, 현장여건 고려하여 목책 기슭막이 설치 재검토 ·통나무 골막이의 적용이유 제시 요망 등	조건부채택
7	과천시	막계동	883	-사면정비 -바닥막이2,기슭막이 148.3㎡ ,목책 25m, 수목식재 등	·토사 유실이 우려되므로 사면안정성 검토 및 사면 보호방안 제시 요망	조건부채택
8	과천시	막계동	산118-3 등	-사면정비 -절토면고르기508㎡, 낙석방지망648㎡, 잡관목 제거 등	·사면안정성 검토결과에 의한 최적의 대안 검토 ·낙석에너지 검토결과에 근거 한 낙석방지망 설계 요망	재심의

□ 주요 지적사항

❍ ‘서울형 사방시설 설계 및 시공기준’에 따라 사면안정성, 낙석에너지 및 지하수 등을 충분히 검토하여 안정성 확보를 위한 최적의 설계 요망

❍ 사업의 목적과 현장여건에 적정한 대안(공법)을 제시하고 시공성과 경제성 등을 비교 검토하여 최적의 공법 적용 및 과다설계 지양

❍ 벌개제근은 집중호우시 위험한 수목만 선별적으로 제거하도록 하고 안정화되어 있는 사면 절취 및 수목 제거는 최소화 요망

❍ 공사중 안전관리계획, 시설물 유지관리계획 제시 필요

□ 설계심의 사진

Ⅲ		행정사항

□ 심의의견에 대한 조치(자치구, 서울대공원)

❍ 심의위원 의견(지적사항)에 대해 사업시행 반영(설계보완) 검토 및 조치결과(증빙자료) 제출

붙임 : 1. 설계심의 결과(2차) 1부.

2. 설계심의 지적사항 및 조치계획(양식) 각 1부.

3. 설계심의위원 심의의견서 각 1부.  끝.