설계변경 사유서

1. 공 사 명 : 영동2교 외 1개소 내진보강공사

2. 공사기간 : 2017. 12. 12 ~ 2018. 11. 11.

3. 공 사 비 : 872,787,400원

4. 도 급 자 : ㈜대한주택안전관리 대표 송선종

5. 공사개요

○ 받침교체 104개, 연단보강(교각 및 교대)

6. 변경사유

○ 영동5교(PSC BOX) 내부 점검을 위한 점검구 설치

- PSC BOX 거더교 점검구 설치 검토결과 보고(시설보수과-7832호, ‘17.10.20.)

7. 변경사항

○ 공사비 변경 현황

(단위 : 원)

구 분	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비	872,787,400	1,002,900,000	증)130,112,600
공 급 가 액	793,443,091	911,727,273	증)118,284,182
부가가치세	79,344,309	91,172,727	증)11,828,418

○ 주요물량 증∙감 현황

(단위 : 개소)

공 종	수 량			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
영동5교 점검구 및 사다리 설치	0	8	증)8