보 고 서
TCM77CS00_010117257600:20401:4			★차장	팀장	공사감독3처장	시설안전본부장
문서번호	공사감독3처-12289
보존기간	준영구		협 조	과장
결재일자	2017.12.13.
공개여부	공개
제 목	공사현장 실정보고서 검토 - 한강 이촌권역 자연성 회복사업

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 한강 이촌권역 자연성 회복사업

나. 도 급 액 : 4,089,690,000원

다. 공사기간 : 2016. 02. 29 ~ 2017. 12. 19

라. 발 주 처 : 한강사업본부 생태공원과

마. 도 급 자 : 임원개발(주) 대표 이 대 성

2. 검토내용

○ 발주처 설계변경 반영사항(생태공원과-3347(2017.12.7.))

구분	설계변경 반영사항	검토결과	비고
수목 이식	○ 현장여건을 고려한 이식 수목 조정	▶ 발주처 요청사항에 따라 이식 수목 변경 - 버드나무(R12) : 2주 → 0 - 버드나무(R20) : 49주 → 13주 - 버드나무(R30) : 17주 → 0 - 버드나무(R35) : 7주 → 0 - 이태리포플러(R12) : 139주 → 16주
수목 식재	○ 경관향상을 위한 수목 식재 반영	▶ 발주처 요청사항에 따라 수목 식재 반영 - 대왕참나무(H5.0×R20) : 0 → 20주 - 대왕참나무(H6.0×R30) : 0 → 32주 - 버드나무(H3.5×R15) : 6주 → 0 - 이팝나무(H3.5×R12) : 0 → 271주 - 양버들나무(H7.0×R20) : 0 → 37주 - 낙우송(H4.5×R15) : 0 → 30주 - 낙우송(H5.0×R20) : 0 → 25주 - 낙우송(H6.0×R30) : 0 → 5주 - 제퍼슨단풍(H3.5×R12) : 0 → 40주 - 팥배나무(H3.5×R12) : 0 → 30주 - 남천(H1.2,5가지) : 0 → 6,000주 - 찔레(H1.0) : 0 → 3,000주 - 조팝골든바(H0.8×W0.3) : 0 → 500주 - 골드스타향(H0.6×W0.3) : 0 → 200주 - 블루카펫향(H0.6×W0.3) : 0 → 200주 - 스칼렛메이딜란드(H1.5) : 0 → 120주 - 화살나무(H0.8*W0.4) : 1,190주 → 3,190주 - 가우라(8cm) : 0 → 15,000본 - 매직카펫(8cm) : 0 → 4,000본 - 수크렁식재(8cm) : 0 → 14,650 본 - 샤스타데이지매트(340×500) : 0 → 306 ㎡ - 톱풀파스텔매트(340×500) : 0 → 153 ㎡ - 잔디(평떼)식재(0.3×0.3×0.3) : 2,625 ㎡ → 3,378.7 ㎡
식재 부대공	○ 식재수량 조정에 맞게 식재 부대공 조정	▶ 수목조정에 맞게 지주목 등 조정 - 원주지주목(D55×L1800×3) : 250 개 → 494 개 - 원주지주목(D70×L2700×3) : 151 개 → 142 개 - 원주지주목(D80×L3600×3) : 0 → 42 개 - 유기질 비료 : 1,299 포 → 1,555 포 - 와이어지주(8mm×8m) : 0 → 37 조 - 식재면 및 바닥면고르기 : 0 → 28,364 ㎡
포장 공사	○ 현장여건 및 경관에 맞게 포장변경	▶ 발주처 요청사항에 따라 포장변경 - 인조화강석블럭(조경)(T60) : 1,986.78 ㎡ → 390 ㎡ - 마사토포장(조경)(T150) : 2,240.06 ㎡ → 800 ㎡ - 경화마사토포장(조경)(T200) : 2,552.62 ㎡ → 800 ㎡ - 디딤석판석 포장 : 789.94 ㎡ → 398 ㎡ - 탄성포장 : 285.22 ㎡ → 0 - 녹지경계석(150×150×1000, 곡선) : 99.83 m → 18.67 m - 녹지경계석(150×150×1000, 직선) : 2,660,90 m → 206.93 m - 녹지경계석(150×150×1000, 곡선) : 28.77 m → 0 - 녹지경계석(150×150×1000, 직선) : 600.72 m → 0 - 경계엣지설치(120mm×1m×1.2T) : 0 → 96 m - 바탕면만들기 : 0 → 420 m
시설물 공사	○ 경관 및 현장여건을 고려한 시설물 조정 안내판 재질변경 데크 난간 변경 초가정,흙먼지털이기, 생태보호휀스 등 시설 반영	▶ 발주처 요청사항에 따라 시설 변경 - 천변저습지-1 : 1식 → 0 - 천변저습지-2 : 0 → 1식 - 잔디수로(W1400) : 133.65 m → 0 - 잔디수로(W0.8×H0.2) : 0 → 810.3 m - 논습지C-1 : 1식 → 0 - 논습지C-2 : 0 → 1식 - 다이나믹슬라이드(10580×100×H3000) : 1 개소 → 0 - 띈다리건너기(8800×2700×H1400) : 2 개소 → 0 - 흔들놀이대C(740×600×H731) : 2 개소 → 0 - 흔들놀이대C(740×600×H731) : 2 개소 → 0 - 흔들놀이대C(740×600×H731) : 2 개소 → 0 - 조형벤치(L3175×W1595×H450) : 5 개소 → 0 - 원형쉘터(740×600×H731) : 2 개소 → 0 - 평의자(1520×466×H466) : 4 개소 → 0 - 평의자(이설)(W1800) : 11 개소 → 0 - 등의자(이설)(1680×717×737) : 17 개소 → 0 - 그물망휀스B(H2.0×W2.0) : 0 → 58 경간 - 그물망문주B(H2.0×W2.0) : 0 → 2 경간 - 수목보호의자(D3000×H400) : 6 개소 → 0 - 음수전(H2000×W900) : 1 개소 → 2 개소 - 종합안내판 : 1개소 → 0 - 종합안내판-1 : 0 → 1개소 - 천변저습지 시설안내판 : 1개소 → 0 - 천변저습지 주의안내판 : 1개소 → 0 - 논습지 이요안내판 : 1개소 → 2개소 - 주의안내판(450×600×H1200) : 1 개소 → 5 개소 - 주차장 안내판: 1개소 → 0 - 방향안내판(600×120×H1800) : 2 개소 → 0 - 놀이시설 안내판(700×1200×H1900) : 1 개소 → 0 - 수변데크 : 1 개소 → 0 - 수변데크-1 : 0 → 1 개소 - 친수계단A : 1 개소 → 0 - 친수계단A-1 : 0 → 1 개소 - 친수계단B : 1 개소 → 0 - 친수계단B-1 : 0 → 1 개소 - 데크로드 : 1 개소 → 0 - 데크로드-1 : 0 → 1 개소 - 관찰데크A : 2 개소 → 0 - 관찰데크A-1 : 0 → 2 개소 - 관찰데크B : 1 개소 → 0 - 관찰데크B-1 : 0 → 1 개소 - 목교 : 1 개소 → 0 - 목교-1 : 0 → 1 개소 - 초가정(4.2×3.2) : 0 → 1 개소 - 흙먼지털이기(1880×2220×2500) : 0 → 1 개소 - 생태보호휀스(W1.5×H0.6,1단) : 0 → 422.66 경간 - 다목적운동장골대 : 0 → 1 조 - 트렐리스지붕설치(W2.15×L13.4) : 0 → 2 개소 - 경계석(180*200*1000, 곡선) : 0 → 16EA - 경계석(150*150*1000, 곡선) : 0 → 107EA
구조물 공사	○ 구조물 공사 제외 반영	▶ 발주처 요청사항에 따라 구조물 제외 - 앉음벽(H400×W400) : 39.94 m → 0 - 계단(W1.2×7단) : 1 개소 → 0
부대 공사	○ 침사지 설치 제외	▶ 발주처 요청사항에 따라 침사지 제외 - 침사지(5×5m) : 3 개소 → 0
	○ 야간 이용시 시민 안전을 위한 솔라등 설치	▶ 발주처 요청사항에 따라 솔라등 설치 - 솔라표지등(∅125×H40, 매립형) : 0 → 122개소
	○ 저습지, 논습지 물공급을 위한 설비시설 반영	▶ 발주처 요청사항에 따라 설비시설 반영 - 천변저습지 설비공사 0 → 1 식 - 논습지 설비공사 0 → 1 식
	○ 주차장 박스 이설 및 센스 설치	▶ 발주처 요청사항에 따라 주차장 이설 및 센스 설치 - 음극선 이설 : 0 → 1 식 - 주차장 센스 이설 : 0 → 1 식
	○ 임목폐기물 처리반영	▶ 발주처 요청사항에 따라 폐기물 처리 - 임목폐기물 : 0 → 16.73ton
토목 공사	○ 이촌한강공원 생태놀이터 조성공사 시행에 따른 본 공사 물량 제외	▶ 현장실측에 의한 물량 조정 - 세부항목 : 내역서 참조
호안 공사	○ 한강철교 하부 콘크리트 깨기 제외에 따른 물량조정	▶ 현장실측에 의한 물량조정 - 세부항목 : 내역서 참조

3. 개략공사비

구 분	금액(천원)			비고
	당 초	변 경	증 감
도 급 비 계	4,089,690	4,406,944	증 317,254
공급가액	3,717,900	4,006,313	증 288,413
부 가 세	371,790	400,631	증 28,841

4. 조치계획

○ 상기 내용에 대하여 발주처의 승인을 득하여 추후 설계변경 시행

붙임 : 개략공사비 내역서 1부.  끝.