투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(총차 4회, 4차 2회, 5차1회) 시행- 한강공원 나들목 증설공사(개화)

우리 본부에서 추진중인 『한강공원 나들목 증설공사(개화)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차 4회, 4차 2회, 5차 1회)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(개화)

나. 계약기간

- 총차 ‘15.10.28.~’18.05.31.(4차 ‘17.03.28.~12.31. 5차 ’17.11.08.~‘18.05.31.)

다. 계약금액

- 총차 5,516,500,000원(4 차 1,100,000천원, 5차 1,174,800천원)

라. 시 공 사 : 주식회사 서우건영

마. 감 리 사 : 주식회사 동일기술공사, 수성엔지니어링

바. 변경금액                                                      (단위:천원)

구 분	총 차(4회)			4 차(2회)			5 차(1회)			비고
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
총공사비	7,000,000	7,000,000	-	1,212,277	1,310,406	98,129	1,900,000	1,900,000	-
도 급 비	5,516,500	5,570,400	53,900	1,100,000	1,212,800	112,800	1,174,800	1,174,800	-
관 급 비	820,704	770,739	-49,965	72,277	76,107	3,830	577,060	504,961	-72,099
이 전 비	662,796	658,861	-3,935	40,000	21,499	-18,501	148,140	220,239	72,099

사. 설계변경사유

- 실정보고 승인사항 반영 및 단순 물량증감 조정

아. 예산과목(4차)

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선, 한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비-(증 94,299,000 시비)

- 치수및하천관리,하천복원및정비,한강관광자원화,시설비-(증 18,501,000 국비)

따로붙임 : 1 설계변경자문위원회 심의결과 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

4. 설계변경 내역서 1부. 끝.

	시설부장
주무관	김동식		치수과장	신용철		시설부장	12/15 최진석
협조자	주무관	심옥경		기획예산과장	김건태		총무과장	박병현
시행	치수과-4413	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개