문서번호	도시제조업지원센터추진팀-996
보존기간	준영구
결재일자	2017.12.11.
공개여부	공개
방침번호

담당	팀장		실장
			전결 12/11
협 조
		예산기획

성수동 수제화 조형물(회전식 샹들리에, 현판) 제작 및 설치 위한 디자인·설계 용역

도시제조업지원센터추진팀

성수동 수제화 조형물(회전식 샹들리에, 현판) 제작 및 설치 위한 디자인·설계 용역

추진 배경

□ 추진 근거: 성수수제화산업 현안 업무 보고 및 협의(회의록, 2017.12.04.)

□ 추진 경과:

◯ ‘17.3.7.(화) 도시제조업지원센터 초기 조성지역(연무장 1길, 3개소)내 수제화 조형물 설치 추진 ⇒ 매입대상 3개소 중 1개소 매도의사 포기로 조형물 설치 중단

◯ ‘17.5.29.(월) 도시제조광역센터 내 4차 산업혁명 관련 조형물 설치 추진 ⇒ 수제화 컨셉 개발 불가로 추진 중단

◯ ‘17.7.27.(목) 도시제조업지원센터 ⇨ 성수수제화희망플랫폼으로 조형물 설치 위치 변경 추진

- 빨간수제화를 활용한 조형물 제작 추진(회전식 구두 조형물, 회전식 샹들리에 조형물, 현판 제작)

회전식 구두 조형물	회전식 샹들리에 조형물	고객과의 약속 현판

◯ ‘17.7.31.(월), ’17.8.3.(목): (서울시) 문래동 소재 기업과 협업으로 2017년 9월 중순까지 구두 조형물 설치 추진 요청

· 1단계) 회전식 구두 조형물 조성(5천만원 이내, 수의계약으로 추진)

· 2단계)	회전식 샹들리에 조형물 및 수제화 화분, 현판 제작·설치(1억 이상 입찰로 추진)

◯ ‘17.9.21.(목): 희망플랫폼 개관식 일정에 맞추어 1단계(회전식 구두 조형물)를 우선 추진하고 ⇨ 2단계(회전식 샹들리에 조형물 및 수제화 화분, 현판 제작·설치)입찰 추진

※ 서울시, 성동구청, 문래소공인특화지원센터 전문가와 성수 수제화 조형물 견적, 설계, 디자인, 설치 일정 및 위치 협의

◯ ‘17.9.22.(금): 성수수제화희망플랫폼 부근 “회전식 구두 조형물(5천만원) 조성 완료”

◯ ‘17.9.26.~28.(목): 성수수제화희망플랫폼 개관식 진행

◯ ‘17.10.12.(목): 서울시와 추가 조형물(회전식 샹들리에, 화분, 현판)제작·설치 추진 중단 협의(사유 : 9. 22일 완료된 조형물로 대체)

◯ ‘17.10.19.(목): 서울시 중단 했던 회전식 샹들리에 조형물과 현판 제작 설치 요청(화분 제외)

◯ ‘17.10.31.(화): 회전식 샹들리에 조형물 및 현판 추진 위해 서울시에 조형물 계약 심사 의뢰 요청

◯ ‘17.11.10.(금): 조형물은 계약심사 제외 대상임을 회신

※ 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제4조 4호 다목(상품권, 종량제 규격봉투, 예술품 등과 같이 계약심사의 실익이 없다고 판단되는 물품(완제품) 제조 구매사업)

◯ ‘17.11.13.(월): 사업기간 내 입찰계약(안)과 수의계약(안) 검토하여 서울시에 보고

구분	입찰계약(1안)	수의계약(2안)	비고
소요기간(완료일자)	70일(‘18.1.22)	48일(‘17.12.29)
디자인 공고(샹들리에/현판)	5일	5일
공고기간(사전규격+입찰공고)	14일	-
적격심사(7일내)및계약체결(3일내)	10일	3일
제작 및 설치 기간	40일	40일	- 금형(35일, 220mm, 100개) - 설치 5일
사업기간 내 추진 여부	추진불가	추진가능 (무회전샹들리에)

◯ ‘17.11.14.(화) : (서울시) 사고이월을 통한 ‘17년도 예산 사용 불가 확인

◯ ‘17.11.14.(화)~27.(월) : 짧은 사업기간을 고려하여 “수의계약으로 추진”

- “문래동 소재 수의계약이 가능한 여성기업 또는 장애인 기업과 1~2단계 추진”

1단계) 무회전식 샹들리에 조형물 및 현판 제작을 위한 디자인 및 설계(990만원)

2단계) 무회전식 구두모형 샹들리에(5천만원), 현판 제작(22개 990만원)

◯ ‘17.11.28.(화): “문래동 소재 수의계약 대상 업체 부재로 사업추진 불가”

- (9월 22일)회전식 구두 조형물로 계약한 회전식 구두 조형물 여성기업은 있으나 분리발주로 계약이 불가하고, 성동구청 관내 타 수의계약 업체의 경우 재하청 계약은 수지타산의 사유로 참여 어려움

◯ ‘17.12.04.(월) : 2017 사고이월(서울시 승인)을 통한 조형물 조성 추진

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 성수 수제화 조형물 제작 및 설치

◯ 사업목적 : 성수 수제화 인지도 및 브랜드 제고를 위한 상징 조형물 조성

◯ 추진방향 : 수제화 조형물 디자인·설계 후 공개입찰

구분	1단계	⇨	2단계
계약방법	디자인·설계 용역 (수의계약)		조형물 제작 및 설치 용역 (공개입찰)

□ 계약방법

◯ 계 약 명: 성수 수제화 조형물(회전식 샹들리에, 현판) 제작 및 설치 위한 디자인·설계 용역

◯ 과업내용: 과업지시서 참조

◯ 계약방법: 수의계약

◯ 계약금액: 일금 구백구십만원정(₩9,900,000) / 부가세 포함

◯ 계약업체: 한빛테크랩(☎ 02-2678-4369)

◯ 대표자명: 이승준(☎ 02-2678-4369)

◯ 주    소: 서울시 영등포구 도림로 139길 4

□ 소요예산: 일금 구백구십만원정(₩9,900,000) / 부가세 포함

◯ 예산과목: 2017/[수탁]성수수제화육성지원/지급수수료

예산계정	산출내역					금액(원)
	공정	세세공정	단위	수량	단가
지급수수료	디자인 기획	샹들리에 컨셉	M/D	9	250,000	2,250,000
		현판 컨셉	M/D	4	250,000	1,000,000
		샹들리에 시안	M/D	4	250,000	1,000,000
		현판 시안	M/D	3	250,000	750,000
	디자인	3D 설계	M/D	8	250,000	2,000,000
		현판 디자인	M/D	5	250,000	1,250,000
		진행비 포함 견적가에 10%	-			825,000
	부가세					907,500
합계(만원단위 절사)						9,900,000

□ 향후계획

◯ 성수수제화 조형물(회전식 샹들리에, 현판) 조성 추진(‘17년 12월 중)

- 2017년 조형물 예산 사고이월 승인 요청(서울시 승인 예정)

- 성수수제화 조형물(회전식 샹들리에, 현판) 제작 및 설치 용역 공고

<용역 개요>

- 용 역 명 : 성수수제화 조형물(회전식 샹들리에, 현판) 제작 및 설치 용역

- 용역기간 : 계약일로부터 2개월 이내

- 공고기간 : 2017년 12월 중 ~

- 계약방법 : 물품 또는 협상에 의한 계약

붙임: 1. 산출기초조사서_외 성수 수제화 조형물(회전식 샹들리에, 현판) 제작 및 설치 위한 디자인·설계 용역 견적서 일체

2. 과업지시서_성수 수제화 조형물(회전식 샹들리에, 현판) 제작 및 설치 위한 디자인·설계 용역

3. 관련 회의록 및 방침 각 1부.  끝.