문서번호	설비부-17329
결재일자	2017.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장	시설국장		도시기반시설본부장
김인호	유병기	권오식	류훈		10/16 고인석
협 조	기획예산과장			안순봉
	경리과장			최정수
	주무관			성호준

- 노들섬 특화공간조성사업 - 기계·전기·통신분야 공사시행 계획 보고

2017. 10.

도시기반시설본부

설    비    부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

- 노들섬 특화공간조성사업 -

기계·전기·통신분야 공사시행 계획 보고

한강의 경관 수준 향상과 시민이 즐길 수 있는 노들섬 특화공간조성사업 관련하여 기계·전기·통신분야의 공사를 아래와 같이 시행하고자 함

1		공사개요

□ 공 사 명: 노들섬 특화공간조성사업 기계·전기·통신 공사

□ 공사위치: 서울특별시 용산구 양녕로 445일대(이촌동, 노들섬)

<현장사진>	<조감도>

□ 건축개요

○ 건축규모: 지상 3층, 최고높이 15.05m

○ 대지면적: 119,854㎡(연면적 9,385㎡)

○ 용도 및 주요시설

- 문화및집회시설(공연장), 업무시설(사무소), 제1·2종 근린생활시설(일반음식점 등), 판매시설(상점), 군사시설(수방사 검문소)

- 노들마당, 보행육교(동·서측 연결), 순환산책로, 다목적마당 등

2		추진경위

○ 2015.02.: 노들섬 문화명소화조성사업 추진계획(공공개발센터-1160호)

○ 2016.06.: 설계공모 시행(공공개발센터)

○ 2016.08.: 설계용역 계약 및 착수(공공재생과)

○ 2017.07.: 실시설계 완료

○ 2017.09.: 계약심사 완료

3		공사 발주방법

□ 공사기간: 총차 착공일로부터 18개월

□ 입찰방법: 제한경쟁입찰(시공능력평가액)

□ 낙찰자결정: 시설공사 적격심사 세부기준(행정안전부 예규)에 의함

□ 계약방법: 장기계속계약

□ 현장설명: 생략(지방계약법 시행령 제15조 제3항)

□ 공 사 비

(단위: 백만원)

구분	계	도급비	관급비	이전비	T.A.B
기계	7,341	3,932	3,367	10	32
전기	6,192	3,257	2,719	216	-
통신	2,046	1,016	1,030	-	-

□ 예산과목

(부서)	도시재생본부 공공재생과	(정책)	공공재생계획 수립	(단위)	공공개발 및 공공공간 확충(도시개발특별회계)
(세부)	노들섬 문화명소 조성사업	(편성목)	시설비 및 부대비	(통계목)	시설비

4		입찰참가 자격 및 제한 등

구  분

입 찰 참 가 자 격

비고

▪입찰자격

기계

아래 업종을 모두 등록한 업체

- 건설산업기본법에 의한 전문건설업(기계설비공사업, 가스시설 시공업)

- 소방시설공사업법에 의한 소방시설공사업(전문 또는 기계분야 일반)

- 하수도법에 의한 개인하수처리시설설계․시공업

※ 기계설비공사업만 소지한 업체는 소방, 정화조, 가스 업체와 공동도급(분담이행) 가능

전기

전기공사업법 및 소방시설공사업법에 의한 전기공사업과 전문소방시설공사업 등록업체

※ 전기공사업만 소지한 업체는 소방시설공사업체와 공동도급(분담이행) 가능

통신

정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록업체

▪공동계약

- 공동이행 및 분담이행 방식의 공동도급 가능

- 공동수급체 구성원별 최소지분율은 5% 이상(분담이행방식 제외)

- 공동수급체는 5개 이내 (※ 혼합방식 경우 1개 업체의 중복참여는 불가)

※ 대표 수급체는 전체공사 출자비율이 높은 업체임

▪지역의무

공동도급

- 입찰공고일 전날부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 서울특별시에 주된 영업소를 둔 자(지역업체)를 공동수급체 구성원으로 하여야 하며,

- 지역업체 최소참여비율은 49% 이상 {단, 지역업체가 요건을 갖춘 경우 단독 입찰이 가능하며, 지역의무공동도급에 따라 공동수급체를 구성하는 경우 해당 지역업체와 그 외 지역업체 간에는 □독점규제 및 공정거래에 관한 법률□에 따를 계열회사(상호출자제한기업집단 소속)가 아니어야 함}

□지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률□ 제29조

□지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령□ 제88조,

□지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준□ [행정안전부 예규 제1호(’17.7.26)]

▪참가제한

- 입찰참가신청 마감일 기준 시공능력평가액(추정가격×1.9)이 다음 기준 이상일 것

기계설비공사업	1,963백만원 이상
소방시설공사업(일반 또는 전문)	1,683백만원 이상
개인하수처리시설설계·시공업	2,991백만원 이상
전기공사업	5,193백만원 이상
통신공사업	1,755백만원 이상

▪직접시공

▪적정임금

지급의무

▪안전서약

- 본 공사의 수급자는 서울특별시 공사계약 특수조건에 따라 주계약자가 해당  공정을 직접 시공하여야 함

- 적정임금(대한건설협회에서 조사공표하는 시중 노임단가 이상)의 지급을 보장하여야 함

□계약상대자는 “서울특별시 직접시공 각서”를 계약 체결일로부터 7일이내에 도시기반시설본부 설비부 담당자에게 제출해야 함

□계약상대자는 “서울특별시 적정임금 지급의무 이행각서”를 계약 체결일로부터 7일 이내에 도시기반시설본부 설비부 담당자에게 제출해야 함

※ 『서울특별시 공사계약 특수조건』 제20조의3 및 제24조10항

- 공사 착공시 안전관련 서약서 제출

□건설공사장 설비분야 안전매뉴얼 활용 서약서 1부.

□공사장 설비분야 사고 초기대응 매뉴얼 활용 서약서 1부.

5		관급자재 수급

□ 관련근거

○「조달사업에 관한 법률」제5조의2 제①항

○「조달사업에 관한 법률 시행령」제9조의3 제①항 2호

○「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제7조 및 제12조

□ 구매품목

<기계분야>

(단위: 원)

연번	품 명	규 격	수량	소요예산	비고
	계			3,367,229,100
1	공기조화기	40,000CMH	1대	134,204,810	조달우수,3자단가
2	저수조	125,500L	1대	51,697,300	조달우수,3자단가
3	부스터펌프	급수250/우수150LPM	2대	16,900,770	조달우수,3자단가
4	천장형복사판넬	435W ~ 866W	1식	16,642,380	조달우수,3자단가
5	전기히트펌프	실내·외기/히트펌프	1식	141,575,120	다수공급자
6	지열히트펌프	실내기, 배관, 덕트	1식	294,446,220	다수공급자
7	전열교환기	100~1000CMH	1식	46,930,120	다수공급자
8	엘리베이터	MRL17인승	6대	304,308,430	조달우수,3자단가
9	수직형리프트	장애인용(340kg)	1식	26,930,000	총액계약
10	화물용리프트	유압식, 일방향형	1식	47,444,820	총액계약
11	자동제어설치	중앙관제장치 등	1식	154,555,560	총액계약
12	지열시스템공사	지열히트펌프, 배관	1식	1,792,257,950	총액계약
13	무대장치제작설치	공연장/다목적홀	1식	339,335,620	총액계약

<전기분야>

(단위: 원)

연번	품 명	규 격	수량	소요예산	비고
	계			2,718,867,960
1	분전반	MCCB 4P 등	1식	207,698,780	조달우수
2	수배전반	1,800kVA	1식	317,498,110	조달우수
3	MCC반	동력반 등	1식	62,140,290	조달우수
4	조명기구	LED 40W 등	1식	344,573,700	조달우수,3자단가
5	경관조명	LED 12W 등	1식	805,496,310	조달우수,3자단가
6	발전기	400kW	1대	51,424,190	3자단가
7	UPS	10kW,20kW	2대	27,508,740	3자단가
8	조명제어	제어반 등	1식	61,805,390	조달우수
9	무대조명	공연장/다목적홀	1식	504,084,280	공개입찰
10	트레이	W200×100H×2.3t 등	1식	21,028,570	3자단가
11	ESS	100kW	1식	315,609,600	공개입찰

※ ESS(에너지 저장장치): 도급자재에서 관급자재로 변경구매

<통신분야>

(단위: 원)

연번	품 명	규 격	수량	소요예산	비고
	계			1,029,843,150
1	통합배선	MDF 등	1식	99,487,530	공개입찰
2	네트워크	IDF 등	1식	100,168,000	3자단가
3	전관방송	방송설비 등	1식	33,880,640	조달우수
4	AV설비	음향설비 등	1식	528,741,660	조달우수
5	CCTV설비	200만 화소	57대	105,572,990	조달우수
6	주차관제설비	무인요금정산기 등	1식	146,617,480	3자단가
7	트레이	W200×100H×2.3t 등	1식	15,374,850	3자단가

□ 수급방법

물품 제작의 전문성 제고 및 품질 확보를 위해 조달우수제품, 조달의무구매제품 등에 대해 제3자단가 및 총액계약 등의 방법으로 관급자재를「조달구매」코자 함.

6		향후계획

□ 2017. 10월: 공사발주 및 계약의뢰(설비부 → 재무과)

□ 2017. 11월: 공사계약 및 착공

□ 2018. 02월: 관급자재 조달구매 의뢰

□ 2019. 04월: 공사 완료.  끝.