문서번호	총무과-45195
결재일자	2017.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
이기림		代소영수	12/26 정상택
협조

2017년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가)

제3차 설계변경 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  12.

행 정 국

(총 무 과)

2017년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가) 제3차 설계변경 시행보고

2017년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가) 준공기한 도래로 공사   시행에 따른 물량조정을 반영한 설계변경(제3차) 시행을 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년도 시청사 건축시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : ’17.02.15 ~ ’17.12.31

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : **********

○ 계약내용 : 건축시설물 유지보수공사 1식

□ 설계변경 내용

○ 관련 근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건(행안부 예규 제1호, ’17.7.26)

- 건축시설물 보수공사 설계변경 적용단가 검토보고(총무과-44979,’17.12.22)

○ 변경사유

*******************************************************************************

○ 주요내용

- 계약금액 변경 (▽36,320,310원)

구 분		금 액			비고
		당 초	***	증 감
총 공사비		************	************	************
도급비	공급가액	************	************	************
	부가가치세	***********	***********	***********
	폐기물처리비	**********	**********	*********
	계	************	************	************

※ 4대보험 및 제경비 정산

구 분		금 액			비고
		당 초	***	증 감
경비	산재보험료	**********	**********	***********
	고용보험료	**********	********	*********
	건강보험료	**********	**	***********
	연금보험료	**********	*	***********
	노인장기요양보험료	********	*	*********
	퇴직공제부금비	**********	********	***********
	산업안전보건관리비	**********	*	***********
	환경보전비	********	*	*********
	기타경비	***********	**********	***********
	건설기계보증수수료	********	*	*********
	계	***********	***********	************

- 계약기간 : 변경 없음 (당초: 2017.02.15.~ 2017.12.31)

□ 설계변경 적용단가 합의내용

○ 물량증감 : *******

○ 신규비목 : *****************************************************

□ 향후계획

○ 설계변경 계약요청	’17.12.26(화)

○ 준공 정산	’17.12.27(수)

- 3차 기성 준공금액 : ***********

*********	*********	***********	**
************	************	***********

붙임 1. 합의각서 1부.

2. 정산 설계변경 내역서, 4대보험완납증명서 각 1부.  끝