함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 및 차수별 금액변경 시행-1차 (2017년 정릉동등 10개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『2017년 정릉동등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여

아래와 같이 설계변경 및 차수별 금액변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 정릉동등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 :**************

다. 계약기간 : 2017.4.25 ~ 2017.12.31(총 공사부기기간 : 2017.4.25~2018.06.30)

라. 설계변경 내용 : 물량 증․감 및 신공종 발생

마. 설계변경 내역                                                     단위 : 원

구 분	당 초	변 경	비 고
총 부기금액	637,408,370	637,408,370	-
1차 부기금액	446,043,900	581,345,600	(증) 135,301,700
2차 부기금액	191,364,470	56,062,770	(감) 135,301,700

바. 차수별 계약금액 변경사유 : 시공물량 증․감 및 신공종 발생 등으로 각 차수 금액의 변동요인 발생

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급.배수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

붙  임 : 1. 설계변경 심의위원회 결과보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	이승환		주무관	代이유찬		시설관리과장	허준행		중부수도사업소장	12/27 유경애
협조자	주무관	김유리나
시행	시설관리과-39609	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)