“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	공원녹지과-37848		주무관	조경팀장		공원녹지과장		도시환경국장
			안지연	주동희		代성손준		전결 12/28 배경섭
등록일자	2017.12.27.
결재일자	2017.12.28.
공개구분	부분공개(5)
			협조자

‘대진고 주변 가로수 가지치기공사’ 사고이월계획

2017. 12.

	강 남 구
(		공원녹지과	)

‘대진고 주변 가로수 가지치기공사’ 사고이월계획

우리구 관내 학교주변 환경개선을 위한 「대진고 주변 가로수 가지치기공사」추진 관련, 특별조정교부금으로 교부된 예산으로 회계연도 내 집행이 불가하여 아래와 같이 사고이월하여 공사추진하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❏ 사 업 명 : 대진고 주변 가로수 가지치기공사

❏ 위    치 : 광평로39길(궁마을삼거리~대진고)

❏ 공사기간 : 2017. 12. 28 ~ 2018. 1. 26

❏ 사업내용 : 양버즘나무 가로수 가지치기 85주

❏ 도 급 비 : 금13,255,000원(금일천삼백이십오만오천원)

❏ 도 급 자 : 남경엘앤씨(주) 대표 강동식

Ⅱ		추진현황

❏ 2017. 12. 08  특별조정교부금 교부

❏ 2017. 12. 22  사업계획(수의계약) 방침수립

❏ 2017. 12. 28  공사계약

Ⅲ		사고이월 상세

❏ 세부내역

세부사업명	2017년 회계연도 예산			지출원인행위 (2017.12.31. 기준)	지 출 액 (2017.12.31. 기준)	2017년 회계연도 이월예산		집행 잔액	이월사유
	통계목	예산 현액	배정액	금액	금액	이월액	준공 예정 년월일
	(과목코드)
동절기 가로수 수형조절	시설비	188,953,000	188,953,000	175,769,000	162,514,000	13,255,000	2018.1.26	13,184,000	아래 참조
	401-01

❏ 사고이월 사유

- 특별조정교부금으로 2017.12.8. 교부된 예산으로 회계연도 내 사업의 시행이 어려워 수의계약 후 사고이월하여 2018년에 사업을 시행하고자 함.

❏ 예산과목

- 공원녹지과, 도시개발, 녹지조성 및 정비, 동절기 가로수 수형조절,

시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		보고자 의견

❏ 대진고 주변 가로수 가지치기 공사 사업예산을 사고이월 하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 사고이월 요구서 1부.

2. 계약서 1부.

3. 지출원인행위부 1부.  끝.