보 고 서
			담당	팀장	상가운영처장	복지경제본부장
문서번호	상가운영처-17262
보존기간	준영구		협 조	선임
결재일자	2017.12.19.			차장
공개여부	공개
제 목	설계변경(정산) 시행보고(건축연간단가)

공사 현황

❍ 공 사 명 : 2017년 건축시설물 유지보수 공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2017. 1.4 ~ 2017.12.20

❍ 공 사 비 : 87,359,000원

☞ 증액시 계약금액 : 97,061,000원(9,702,000원 증액)

❍ 공사개요 : 25개 지하도상가 유지보수(누수 보수, 마감재 교체 등)

❍ 도 급 사 : ㈜에프엠텍 대표 유동기

보고 내용

❍ 공사비 변경 내용 : 증) 9.702,000원

구 분		당 초	변 경	증 . 감		비 고
공사비	공 급 가 액	79,417,273	88,237,273	+	8,820,000
	부가가치세	7,941,727	8,823,727	+	882,000
	계	87,359,000	97,061,000	+	9,702,000

❍ 준공도래에 따른 설계변경 시행 보고

□ 사    유 :  신규공종 발생 및 보험료, 제경비 정산

❍ 설계변경 주요 내용

연 번	작업지시	주요 내용	직접공사비 증.감	비 고
1	□ 1차	□ 강남터미널 지하도상가 - 천장점검구 설치 ※관련근거:상가운영처-863호 (‘17.01.18)	□ 증)3.5백만원
2	□ 2차	□ 인현 지하도상가 - 안전펜스설치 ※ 관련근거 : 상가운영처-1216호(‘17.01.25)	□ 증)1.7백만원
3	□ 3차	□ 을지로2구역 지하도상가 - 장애인 경사로 보도 설치 ※ 관련근거 : 상가운영처-2654(‘17.02.22)	□ 증)6백만원
4	□ 6차	□ 을지로3가 지하도상가 - 차수벽 및 차수판 설치 ※ 관련근거 : 상가운영처-8407호 (‘17.06.20)	□ 증)3.6백만원
5	□ 7차	□ 영등포역 지하도상가 - 5번 출구 누수부위 보수 및 천장재 교체 ※ 관련근거 : 상가운영처-11705호(‘17.08.28)	□ 증)3백만원
6	□ 9차	□ 을지로3구역 지하도상가 - 오배수관 누수 보수 ※ 관련근거 : 상가운영처-13216호(‘17.09.26)	□ 증)4.8백만원
7	□ 10차	□ 인현 지하도상가 - 천장,벽,바닥 마감재 공사 □ 잠실지하광장 지하도상가 - 칸막이 분칸공사 ※ 관련근거 : 상가운영처-14898호(‘17.11.07)	□ 증)19백만원
	□기존내역	□ 실시공 물량 정산	□ 감)30백만원

❍ 보험료,제경비 정산

구 분		당 초	변 경	증 . 감	비 고
항목	건강보험료	793,940	0	-793,940
	연금보험료	1,162,888	0	-1,162,888
	노인장기요양보험료	52,003	0	-52,003
	산업안전보건관리비	1,878,208	0	-1,878,208
	환경보전비	167,373	0	-167,373
	하도급지급보증수수료	45,190	0	-45,190
	건설기계발급수수료	273,376	0	-273,376
	계	4,372,978	0	-4,372,978

행정 사항

❍ 설계변경 사항을 총무처에 의뢰하여 변경계약 하고자함.

※ 설계변경 심의 대상 아님 : 계약금액 1억원 이하

❍ 소요예산은 낙찰차액 활용

붙 임 : 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.