				★과장			팀장	도로시설처장	도로관리본부장
문서번호		도로시설처-955
보존기간		10년		협 조
결재일자		2017.01.31.
공개여부		공개
터널내 DMB 중계설비 설치 계획
			2017. 1.
						도로시설처

터널내 DMB 중계설비 설치 계획

도로터널을 전쟁,지진 등 유사시 대피장소로 활용하기 위한 국가재난방송이 가능하도록 DMB 중계설비를 설치하도록 되어 있어, 공단에서 관리하는 터널내 DMB 중계설비 설치계획을 수립하여 재난․방재관리 강화에 만전을 기하고자 함  ※ DMB : 디지털멀티미디어방송(Digital Multimedia Broadcasting)

□  관련근거

○ 방송통신발전 기본법 “40조의3 재난방송 수신 시설의 설치” (2014.6.3. 신설)

- 터널내 이동멀티미디어방송(DMB)의 수신에 필요한 중계설비 설치

○ 도로터널 방재시설설치 및 관리지침 “4.3 비상방송설비” (2016.8.12. 개정)

- 방재등급 3등급 이상 터널에 DMB로 비상방송이 송출되도록 구성

○ 도로사업소 기전과장 회의결과 송부(도로시설과-703, 2017.1.16.)

- 홍지문,정릉,구룡터널 : 자동차전용도로 도로기전시설물 관리위탁의 수선유지비 등을 활용, 공단에서 자체적으로 설치추진(사업비:228백만원)

○ 도로터널 DMB 재난방송 중계설비 설치계획 송부(도로시설과-1013, 2017.1.20.)

- 터널내 재난방송(DMB,라디오) 성능측정 용역 실시 요청

☞ 방재등급 3등급 이상 터널에 DMB중계설비 설치 및 성능측정 용역필요

□  설치대상 및 소요예산

구 분	터널연장 (m)	대상선정 (3등급이상)	소요예산(천원)			비고
			합계	설치비	측정용역비
합 계	-	-	232,470	228,360	4,110
홍지문	1,890	○ (2등급)	139,930	137,190	2,740
정 릉	1,650	○ (2등급)
구 룡	1,180	○ (2등급)	92,540	91,170	1,370
방 화	495	× (4등급)	-	-	-

	《 2017년 市 DMB 설치관련 예산반영 결과 》
○ 사 업 명 : 남산1호터널외 11개소 DMB 중계설비 설치(공단관리 터널 3개소 포함) ○ 예산반영 : 서울시 전체 설치대상(12개소) 일괄요구 - 당초 요구액 : 1,071백만원(시설비 843백만원, 자본적대행사업비 228백만원) - 최종 반영액 : 587백만원(시설비 587백만원, 자본적대행사업비 미반영)

☞ 자본적 대행사업비 미반영으로 공단 예산(경상적 대행사업비) 활용 불가피

□ 예산 활용방안

○ 2017년 주요 예산편성 규모

(단위 : 백만원)

구 분		2017년	2016년	증감액	비 고
합 계		5,587	5,239	348
	수선유지비	1,595	1,335	260
	연간단가 공사	990	900	90
	주요자재 구매	300	300	-
	기타 시설정비 등	305	135	170	설비 노후화 확대
동 력 비(전기요금)		3,913	3,809	104	인수시설물 증가
위탁관리비(용역비)		79	95	-16

※도로 기전설비 노후화 및 인수시설물 증가 등으로 수선유지비 및 동력비 증 편성

○ DMB 중계설비 설치예산(228,360천원) 확보 방안

- 연간단가 낙찰차액 우선활용 : 134,289천원(수선유지비)

(단위 : 천원)

공사명	발주금액	계약금액	낙찰차액	비 고
합 계	990,099	855,810	134,289	-
자동차전용도로 기전시설물 일상유지보수 전기공사(강남)	495,099	428,149	66,950
자동차전용도로 기전시설물 일상유지보수 전기공사(강북)	495,000	427,661	67,339

- 설치예산 추가소요 금액(94,071천원)은 수선유지비에서 우선 활용하고 향후 동력비 집행잔액 등에서 전용 처리하여 예산의 효율적 활용.

○ 재난방송 성능측정 용역비(4,110천원) 확보 방안

- 점검용역 발주잔액 활용 : 4,110천원(위탁관리비)

(단위 : 천원)

용역명	편성예산	발주금액	발주잔액	비 고
터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지관리 점검 용역	27,000	20,548	6,452

□ 터널 DMB 중계설비 설치 계획

○ 사 업 명 : 자동차전용도로 터널 DMB 중계설비 구매설치

○ 설치대상 : 홍지문․정릉, 구룡터널(3등급 이상)

○ 설치내용 : DMB 송․수신기, 수신안테나, 선로증폭기, 분배기 등

○ 사업기간 : 2017년 1월 말 ~ 6월 말

○ 소요예산 : 228,360천원

○ 예산과목 : 도로기전,대행사업비,수선유지교체비,수선유지비

○ 발주방법 : 일반경쟁입찰

<터널내 DMB 중계설비 설치 계통도>

※ 서울시 DMB 추진계획(기준) 및 방침에 의거 추진

□ 터널 재난방송 수신성능 측정용역 계획

○ 용 역 명 : 자동차전용도로 터널 재난방송 수신성능 측정용역

○ 측정대상 : 홍지문․정릉, 구룡터널

○ 측정내용 : 터널 입․출구 및 터널 내부 DMB/라디오 동시측정

○ 용역기간 : 2017년 2월 ~ 6월 말

○ 소요예산 : 4,110천원

○ 예산과목 : 도로기전,대행사업비,위탁관리비,위탁관리비

○ 측정기관 : 한국전파진흥협회(전파법 제66조의2에 의한 법인)

□ 행정사항

○ 공단터널 DMB 중계설비 설치계획 송부(공단 →市, 1.31한)

○ 계약심사(서울시) 및 일상감사 완료 후 구매설치 계약의뢰(총무처)

○ 터널 재난방송 수신성능 측정용역 계약의뢰(총무처)

○ 수선유지비 연간단가 추산액 조정(발주금액을 계약금액으로 감조정)

○ 동력비 집행 잔여액은 수선유지비로 전용처리 예정(하반기 중). 끝.