문서번호	토목부-24087
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
이상욱A		이동훈	11/17 김영수
협조
	주무관		박웅교

설계변경(4회) 검토 보고

(서울역 7017 프로젝트 건설공사 접속부 건설폐기물 처리용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

설계변경(4회) 검토 보고

(서울역 7017 프로젝트 건설공사 접속부 건설폐기물 처리용역)

『서울역 7017 프로젝트 건설공사 접속부 건설폐기물 처리용역』 시행 중 시설공사 준공에 따라 발생된 폐기물 등을 변경(정산)하고자 설계변경(4회)  검토 보고드림.

1		관련근거

▢ 진우 제17-535(‘17. 11.15.) : 건설폐기물처리용역(접속부) 설계변경서 제출

2		용역개요

▢ 용 역 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사 접속부 건설폐기물 처리용역

▢ 용역규모

- 운반 : 폐콘크리트   711㎥, 폐아스콘   695㎥

- 처리 : 폐콘크리트 1,635톤, 폐아스콘 1,633톤

▢ 용역기간 : 2017. 3. 2. ~ 2017. 11.21.

▢ 총용역비 : 금 83,203천원

▢ 계 약 자 : 삼흥도시개발(주), 삼흥산업개발(주)

▢ 감 리 사 : ㈜진우엔지니어링외 3개사

3		설계변경 검토

▢ 설계변경 사유

- 본 공사 중 현장여건 변동으로 발생(변경)된 폐기물 처리물량 반영

- 퇴계로 한전지중화 등 폐기물 추가 발생에 따른 처리물량 반영

- 기타 본 공사 준공에 따른 폐기물 처리물량 변경(정산) 등

▢ 설계변경(4회) 내용

공 종		단 위	당 초	변 경	증, 감
운반	폐콘크리트	㎥	711	791	증 80
	폐아스콘	㎥	695	654	감 41
처리	폐콘크리트	톤	1,635	1,819	증184
	폐아스콘	톤	1,633	1,536	감 97

▢ 공사비 변경 현황

【금액단위 : 천원】

공 종	규 격	단위	당초		변경		증·-감
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
1. 폐기물 처리	콘크리트	ton	1,635	25,782	1,819	28,686	184	2,904
	아스팔트 콘크리트	ton	1,633	27,181	1,536	25,567	-97	-1,614
2. 폐기물 운반	콘크리트	㎥	711	9,389	791	10,447	80	1,057
	아스팔트 콘크리트	㎥	695	9,353	654	8,796	-41	-557
	일반관리비	식	1	1,874	1	1,924		50
소계				73,579		75,420		1,840
3. 이윤		식	1	2,060	1	2,110		51
4. 공급가액		식	1	75,639	1	77,530		1,891
5. 부가가치세		식	1	7,564	1	7,753		189
총 계				83,203		85,283		2,080

▢ 예산과목

- 도시개발특별회계, 보행정책과, 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 보행환경개선, 한양도성안 도로공간재편(퇴계로), 시설비(401)(69,709천원)

- 보도환경개선과, 가로환경 수준 개선, 가로환경 개선, 가공배전선 지중화 사업 추진, 시설비(15,574천원)

4		조치의견

▢ 상기 보고내용과 같이 현장여건 변경과 시설공사 준공에 따라 폐기물 처리물량 등 변경(정산)이 필요함에 따라 설계변경(4회)하여 폐기물처리용역 업무 추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(정산) 1부.   끝.