문서번호	한강관광사업과-1223
결재일자	2017.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	한강관광사업과장	총무부장		한강사업본부장
강윤자	손창열	박기용		05/23 유재룡
협 조
	재무과장		김윤규
	기획예산과장		김건태
	총무과장		박병현
	주무관		심옥경

한강함상공원 공사

설계변경 시행 계획

2017. 5.

한강사업본부

[한강관광사업과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

- 한강함상공원 공사 -

설계변경 시행 계획

한강의 역사 교육·체험 및 안보·평화의 장으로 조성예정인 “한강함상공원 조성사업”의 신속한 추진을 위해 함정 보수·예인공사를 기 계약된 공사에 포함하여 시행하고자 설계변경 계획을 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 한강함상공원 조성사업

○ 공사내용 : 안내센터 및 고속정 기초 구조물, 서울함 계류시설 설치 등

○ 공사기간 : 2017. 5. 18 ~ 2017. 11. 13

○ 총공사비 : 4,991,713천원

(도급비 2,522,497천원, 관급비 347,838천원, 이전비 2,121,378천원)

○ 도 급 자 : 태평로건설(주)  대표 류지연

□ 설계변경 사유 및 내용

1) 설계변경 사유

○ 공정 추가 : 함정 수리·예인 공정 추가

→ 본 공사 발주시(5월1일) 선박분야 설계서가 일괄견적으로 제출되어 계약심사 등 설계내역에 대한 검증이 불가하여 본 공사내용에 미포함

○ 절대공기 부족 : 추가 공정 분리 시행시 사업자 선정(입찰) 등에 따른 공사 지연으로 연내 개장 곤란

→ 함정예인 지연시 후속 공정 일정 지연이 불가피해 당초 계획한 금년내 개장은 어려울 것으로 판단됨

○ 준설비 절감 : 함정예인 예정일인 6월 24일은 연중 최대수심 확보(평시 대비 최대 2m)가 가능한 대사리 시작일로 준설예산 절감 가능

(평시 준설량 202,143㎥, 대사리 준설량 66,990㎥)

2) 설계변경 내용 : 함정 수리 및 예인 공사 추가

○ 함정 수리

· 서울함 : 전시를 위한 격벽 부분철거 등 내부 구조변경 및 외부 계단 설치, 도장, 상부구조물 절단 등

· 고속정 : 영상관 조성에 따른 내부 구조 변경 및 도장 등

· 잠수함 : 외부 관람을 위한 외벽 부분 절단, 도장 등

○ 함정 예인 : 통영조선소 ~ 아라뱃길 ~ 서울갑문 ~ 사업부지

□ 공사 물량 및 예산 변경 현황

○ 수량 변경 : 기존 계약물량 변경없이 신규공종 물량 추가

- 함정 수리

함정명	공 종	내 용	수 량	비고
서울함	철거후 메공	소나돔	2개
		프로펠라 및 선미축	2개
	절단/철거후 재조립	O2 deck 상부 절단/보강	1개소
		마스트, 킹포스트 및 감시플랫폼	1개소
		연돌 및 내부 부속물	1개소
	구조변경	사병식당 출입구 확장	1개소
		사관실 출입구 확장	2개소
	시설물 신설	외부사다리 설치	3개소
		안전난간 설치	505m
	도장	외부	18,297.29㎡
고속정	구조변경	엔진룸 출입구 확장	1개소
		식당 출입구 확장	1개소
		엔진룸 후부격벽 개구 확장	1개소
		통로 개구 확장	2개소
		엔진룸 개조(영상실활용)	1개소
	시설물 신설	O2 deck 사다리	1개소
		엔진룸/식당 계단	1개소
		안전난간 설치	85m
	도장	외부	2,885.21㎡
잠수함	구조변경	정면부 외판 절개	8.95m/1.85m
	도장	외부	845.53㎡

- 함정예인 : L=760km

· 진해(해군본부) → 통영(조선소) : 80km

· 통영(조선소) → 서해갑문 : 650km

· 서해갑문 → 사업부지(망원한강공원) : 30km

○ 소요예산 : 2,046,461,000원

- 도급비 : 1,946,461,000천원

- 안전도 검사 경비 : 100,000,000원(이전비)

○ 예산확보 방안 : 이전비 사용

-  기발주된 공사의 사업비 중 이전비(2,121,378천원) 활용

○ 예산 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
총공사비		4,991,712,900	4,991,712,900	-
도급비	공급가액	2,293,179,000	4,062,689,000	증)1,769,510,000
	부 가 세	229,317,900	406,268,900	증) 176,951,000
	계	2,522,496,900	4,468,957,900	증)1,946,461,000
관급자재비		347,838,000	347,838,000	-
이 전 비		2,121,378,000	174,917,000	감)1,946,461,000

□ 조치계획

○ 설계변경에 대한 심사 결과 반영 설계변경 시행

○ 추가되는 공종에 대해 시공사와 사전 협의

□ 행정사항

○ 설계변경 심사 요청

- 심사부서 : 계약심사과

- 심사내용 : 사업비 적정 여부 등

- 심사기간 : 10일 이내. 끝.