투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	업무지시(실정보고 승인사항 재검토 요청사항에 대한 회신)

1. 한종(중랑)감 제17-273호(2017.10.19.)와 관련입니다.

2. 본 사항은 당초 귀 감리단에서 검토 보고[한종(중랑)감 제17-139호, 2017.04.27.]하여 승인 처리된 실정보고 사항으로,

3. 금회 다시 시공사측에서 제기한 계측기기 가감정산 실정보고 사항 재검토 요청사항에 대한 감리단 검토 보고 사항을 검토한 결과 아래와 같이 회신하오니 입찰안내서 등 관련 법에 근거하여 정확하고 면밀하게 검토하여 처리하여 주시길 바랍니다.

가. 회신내용

- 시설현대화 계측기기 시공물량 증감 발생에 따른 설계변경사항에 대해서는 이미 실정보고 승인 처리된 사항으로 당초 2017.10.12.일 공사관계자 회의시 시공사측에서 본 실정보고 설계변경 사항에 대한 구체적이고 명화한 법률적 자문을 받아서 감리단에 검토할 수 있도록 제출하기로 한 바,

- 현재 시공사에서 제출한 유사질의사항으로는 감리단 검토의견과 같이 설계변경 재검토가 불가하기에 감리단에서는 정확한 법률적 자문을 근거를 가지고 본 사항에 대하여 검토 보고하여 처리하여 주시길 바랍니다.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김두환		열빛총괄과장	10/19 유병기
협조자
시행	설비부-17599	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	부분공개(5)