일상감사의견서

감사청구 부서명	안전치수과	회신일	2017. 12. 27.
감사청구 사업명	2018년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가)
감사개요	○ 공 사 명: 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가) ○ 공사위치: 광진구 관내 ○ 공사기간: 착공일로부터 2018. 12. 31.까지 ○ 총공사비: 1,815,000천원(도급비1,401,750 관급161,654 이설비251,596) ○ 공사개요: 하수관 부설 D=250~1,200㎜, L=132.9m, 침수방지시설 400세대 등 ○ 검토사항: 원가계산 적정 여부 등
일상감사 의견	○ 원가계산 조정 - 산업안전보건관리비: 반영여부 검토 및 정산시행 요망 ☞ 연간단가계약 공사의 경우 각각 개별단위의 총 공사금액이 4천만원 이상인 경우에 한하여 계상(노동부고시) - 기타경비: (재+노)*6% → 6.2% ☞12개월 적용 - 고재처리: 감(-)금액조정 및 제경비 제외 ○ 일위대가 조정 - 7호표 아스팔트 포장절단: 보통인부 0.0075인/m → 0.002인/m 커터 0.02HR/m → 0.016HR/m ☞ 2017년 표준품셈 토목 10-4-2.9 참조 - 8호표 콘크리트 포장절단: 보통인부 0.0057인/m → 0.002인/m 특별인부 0.0028인/m → 0.002인/m, 커터 0.022HR/m → 0.016HR/m ☞ 2017년 표준품셈 토목 10-3-2.3 참조 - 11호표, 12호표, 주택가 할증 적용: 경비 → 노무비 - 35호표 하수관 천공 및 접합(450*300): 하수관 천공기 0.281HR/개소 → 0.271HR/개소 일반기계운전사 0.042인/개소 → 0.04인/개소, 특별인부 0.045인/개소 → 0.044인/개소 보통인부 0.087인/개소 → 0.084인/개소 ☞ 2017년 광진구 공통대가 참조 - 43~47호표, 121호표, 141호표, 165~169호표, 210~212호표: 손료 경비적용 - 89~96호표: 2종 콘크리트(인력소형) 0.29㎥/개소, 0.51㎥/개소, 0.97㎥/개소 삭제 ☞ 2017년 광진구 공통대가 참조 - 107~113호표: 물탱크 살수차 1대/일 → 0.5대/일 적용 ☞ 2017년 표준품셈 토목 10-2-2 참조 - 165~169호표 잡재료비 인력품의 5% → 1% 적용 ☞ 2017년 표준품셈 토목 10-6-2 참조 - 171호표 부직포포설 보통인부 0.02인/㎡ → 0.03인/㎡ ☞ 2017년 표준품셈 토목 5-6-2 참조 - 191호표 하수관 천공(450-100): 하수관 천공기 0.095HR/개소 → 0.093HR/개소 일반기계운전사 0.017인/개소 → 0.014인/개소, 특별인부 0.019인/개소 → 0.015인/개소 ☞ 2017년 광진구 공통대가 참조 ○ 자재단가 조정 - 고철철 170원/㎏ → 190원/㎏ ☞물정Ⅱ-975 참조 〈42,746,000원 감액조정〉
일상감사청구에 대한 검토결과를 위와 같이 알려드리니 조치 후 통보바랍니다.
2017. 12. 27.