문서번호	설비부-228
결재일자	2018.1.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
곽용길		여인웅	01/08 권오식
협조

『서울 기록원 건립 통신공사』

물가변동(ESC)에 따른 계약금액 및 1차 물량내역 조정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.01.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울 기록원 건립 통신공사』

물가변동(ESC)에 따른 계약금액 및 1차 물량 내역 조정 검토보고

우리본부에서 시행중인 『서울 기록원 건립 통신공사』 감리단으로부터 물가변동(ESC)에 따른 계약금액 조정 및 1차수 물량 내역 조정에 대한 실정보고가 있어 이를 검토하고 보고 드림.

공사개요

◯ 건    명 : 서울 기록원 건립 통신공사

◯ 규    모 : 통합배선설비, CCTV 및 방송설비, 주차관제설비 등

◯ 공사기간 : 2016.04.11.~2018.10.17.(1차, 2018.01.30)

◯ 공 사 비 : ***************************

◯ 사 업 자 : ㈜이엔비원 ******

◯ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링

관련근거

○ 서울기록원 제2018-005호(2018.01.04.) 서울기록원 건립 통신공사 물가변동(ESC 1회, 2회)으로 인한 계약금액의 조정 보고

보고 내용

○ 물가변동에 따른 계약금액(1회, 2회) 조정

구 분	기 준	1 회	2 회	비고
전 체		***********	***********
물가변동기준시점		2016.4.6	2016.9.1
물가변동비교시점		2016.9.1	2017.1.31
기간 경과	계약일로부터 90일 경과	147	151
물가변동조정율	3% 이상	3.28%	3.40%
공정률	실공정	0.00%	0.00%
ESC 조정금액		**********	**********

○ 건축공정 및 1차수 물량변동(ESC) 반영(1회, 2회)에 따라 1차수 물량 내역 변경이 필요함.

○ 1차수 금액 변경 현황

(단위 : 천원)

구 분	증감내용	당초금액	변경금액	증감	비고
통합배선설비	- 매입배관 물량감소 - UTP 케이블 배선 증가	******	******	******
CATV 설비	- 매입배관 물량감소 - 동축 케이블 배선 증가	*****	*****	******
방송설비공사	- 매입배관 및 박스 물량감소	******	******	******
CCTV 공사	- 매입배관 물량감소 - UTP 케이블 배선 증가	*****	*****	****
출입통제 공사	- 매입배관 및 박스 물량감소	******	******	******
AV 공사	- 매입배관 및 박스 물량감소	*****	*****	******
비상벨 공사	- 매입배관 및 박스 물량감소	*****	*****	******
주차관제 공사	- 매입배관 물량감소	***	***	****
통신 트레이 공사	-	*	*	*
소 계		******	******	******
제 경 비		******	******	******
1회 ESC	1차수 반영		******	******
2회 ESC	1차수 반영		******	******
합 계		*******	*******

공사비 조정 금액

(단위:원)

구 분	계약금액	조정금액	증‧감(ESC 분)	비 고
총 차	***********	***********	***********
1 차	***********	***********	*	내역변경 및 ESC 1차분 반영

감리 검토의견

○ 물가변동 조정요건(경과기간 90일 이상, 조정율 3%이상) 적정

○ 물가변동 비목분류 및 계수산출과 물가지수 산출 적정

○ 상기와 같이 물가변동(1회,2회)으로 인한 계약금액조정 신청은 관련근거 및 제 규정에 적정한 것으로 판단되며, 1차수 물가변동 계약금액 조정을 위한 물량내역 변경이 적정한 것으로 판단됨.

조치의견

○ 위 계약금액 조정(ESC) 요청 및 1차수 물량내역 변경건에 대하여 검토한 결과 관련규정 및 감리단 검토 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며,

○ 건설총괄부에 계약금액 조정 및 1차수 물량 내역 변경 요청하고자 함.

따로붙임 :  공문사본 1부.  끝.