설계변경 사유서 (제2회)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2017년 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 3. 31. ~ 12. 31.

○ 공사개요 : 아스팔트 포장 79a, 콘크리트포장 14a, 보도블록포장 24a

○ 총공사비 : 974백만원(도급비 617백만원, 관급비 251백만원, 이전비 106백만원)

○ 도 급 자 : 건희건설(주) 대표  이종미

□ 설계변경사유

○ 공사 시공 물량 변경

○ 주요공종 시공물량 증·감 내역

- 아스팔트 포장       A=79a  →  A=172a(증 93a)

- 콘크리트 포장       A=14a   →  A=9a(감 5a)

- 보도블록포장         A=24a  →  A=34a(증 10a)

- 기타 1식

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감 내역	비 고
총공사비	974,357,000	1,497,000,000	증) 522,643,000
도 급 비	616,940,000	816,940,000	증) 200,000,000
관 급 비	251,350,980	324,264,600	증) 72,913,620
이 전 비	106,066,020	355,795,400	증) 249,729,380

2017. 11.

도로과장 최 광 천