문서번호	자연생태과-1131
결재일자	2018.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장		푸른도시국장
이정호	박경옥	하재호		01/17 최윤종
협 조
	사면관리팀장		최석환

2018. 물순환생태계류 조성 추진계획

2018. 1

푸른도시국

(자연생태과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2018. 물순환생태계류 조성 추진계획

산림 내 계류 본래의 자연성을 최대한 살리고 훼손된 계류는 주변 목재와 자연석을 이용하여 물을 머금고 흐르게 하는 생태계류로 조성하여 산림  생태계 식생강화 및 기반 확충

Ⅰ	추진방향

계류 본래의 자연지형 회복 및 물순환기능 강화

- 인공구조물로 훼손된 계류를 정비하여 자연지형 회복

- 직선 수로는 자연지형에 어울리게 사행화(蛇行化)하여 산림 내 수자원을

함양함으로써 건천화 방지

치수적으로 안전하고 생태적으로 건강한 계류 조성

- 빗물저수 및 홍수방지 기능을 병행할 수 있는 생태보 설치 등으로

습지환경을 조성하여 야생 동·식물 서식환경 기반 제공

계류 주변 식생대 조성으로 산림생태계 강화

- 계류 주변에 수생 초화류, 수목 식재 등으로 동식물 서식처 제공

Ⅱ	사업개요

대 상 지 : 관악구 신림동 산117-28일대 등 6개소(3,470㎡)

사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.

사업내용 : 계류의 친환경 정비, 생태보 설치, 수변 식생대 조성 등

사 업 비 : 1,110백만원

연도별 추진실적

구 분	계	’08 ~ ’14	2015	2016	2017
계류 조성(개소)	45	31	4	4	6
예산액(백만원)	7,317	5,707	315	345	950

Ⅲ	세부 추진계획

사업 대상지

추진부서	위 치	예산액	규모	사업 내용
	계	1,102	계류 6개소 3,470㎡
관악구	신림동 산117-28일대	440	계류 300m 및 생태보 조성(1000㎡)	- 계류 정비, 생태보 설치 - 초화류 및 수생식물 식재 등 * 중부녹지사업소 계류사업은 지역여건(생태경관보전지역)을 고려하여 녹색위원회 검토 요함
성북구	성북동 168-274	250	계류 200m 및 생태보 조성(1000㎡)
도봉구	창동 산194-2	52	계류 25m 및 생태보 조성(150㎡)
종로구	무악동 산3-12	60	계류 200m 및 생태보 조성(400㎡)
동부녹지	길동 산7-3	100	계류 150m 및 생태보 조성(300㎡)
중부녹지	예장동 산5-6	100	계류 123m 및 생태보 조성(620㎡)
사업소 등	시 산하 사업소 및 추가 대상지	100	계류 및 생태보 조성

추진일정 및 방법

사업 추진계획 수립․통보 (시 ⇨ 자치구, 사업소)    : ’18. 1.

용역타당성 심사(시행부서 ⇨ 기술심사담당관)          : ’18. 1. ~ 2.

생태계류 담당자 교육(계류사업 우수 현장 답사)    : ’18. 2.

설계용역 시행(자치구, 사업소)                   : ’18. 2. ~ 5.

- 설계용역 추진시 시(자연생태과)․사업시행부기관 설계 추진사항 협의(중간 및 최종)

설계심의 (자치구 ⇨ 시 자연생태과)                 : ’18. 4. ~ 5.

- 설계심의는 설계 공정 70% 정도 진행 시 요청

- 설계심의는 필요시 현장에서 실시

공사 시행(자치구 및 사업소)                        : ’18. 6.~ 10.

공사 착․준공 보고 (자치구 ⇨ 시 자연생태과)

- 발주는 6월 이전, 준공은 최소 10월까지 완료

- 사업 완료 후 사업비 집행액 세부내역(지출원인행위부 등), 준공 내역서,

공사현장 사진 등을 첨부하여 제출

사업 추진시 유의사항

설계 단계부터 생태관련 전문가를 참여시키고 양서류, 파충류, 조류 등 야생 동물 서식을 고려한 주변 식생 조성

- 전문가와 함께 사업대상지를 답사하여 사업시행 전·후 생태관련 자료 확보(주변 식생, 동식물 서식 등을 조사하여 착공 보고서에 생태관련 증빙자료 첨부,

조성 후 안정화 진행여부 관련 자료 및 관리카드 제출)

지질안정성 검토 및 조치

- 상류로부터 흘러내리는 큰돌 또는 토사 등에 의한 충격․퇴적으로 발생하는

피로현상을 완화할 수 있는 공법 채택 (설계심의시 산지방재과 참여)

- 가능한 콘크리트 사용을 억제하고 연중 우수 저장이 가능한 누수식 생태보 설치 등 지속가능한 공법(자재) 사용 권장 (붙임1 참조)

* 산림 내 누수식생태보 안정성 검증 학술용역 참조 (14년 3월 발간)

과도한 시설물(특히 정자 등) 설치 지양 및 주변 식생과 경관과의 조화는 물론 사후 유지관리까지 고려

설계과정에 주민 및 유관기관 의견 수렴으로 민원 예방, 사업지연 방지

설계변경 주요사항은 시(자연생태과)와 사전 협의후 시행

여름철 우기를 고려한 설계 및 공사 발주로 10월까지 완료 추진

Ⅳ	행정사항

공사 착공 및 준공 : 7일 이내 보고 (자치구 ⇨ 시 자연생태과)

- 주민설명회, 착·준공식 행사, 언론 보도자료 제공시 시(자연생태과)‧구 협의․시행

- 사업 완료 후 사업비 집행액 세부내역(지출원인행위부 등), 준공 내역서,

공사현장 사진 등을 첨부하여 제출

’18. 푸른도시국 주요업무 추진지침에 따라 기존 사업시행지 점검(반기 1회) 및 유지관리, 생태모니터링 관리카드 및 점검표 작성 비치(자치구)

붙임 : 누수식 생태보 설명자료 및 생태보 도면 각 1부