문서번호	계약심사과-14170
결재일자	2017.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		심사총괄팀장	계약심사과장
임장경		최광운	07/26 안호
협 조
	건축심사팀장			代박태욱
	주무관			이용성

「서울 공예박물관 건립 기본설계」 설계경제성(VE) 심사 실행계획

2017. 7.

계약심사과

「서울 공예박물관 건립 기본설계」

설계경제성(VE) 심사 실행계획

도시기반시설본부에서 시행하고 있는「서울 공예박물관 건립 기본설계」에 대한 심사전담팀을 구성하고, 설계경제성(VE) 실행 계획을 수립하여 추진하고자 함.

1		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ 설계경제성 심사운영 개선계획(행정1부시장방침 제15호, ’17.1.22)

2		심사개요

□ 추진부서 : 도시기반시설본부(건축부)

□ 사  업  명 : 서울 공예박물관 건립

□ 위    치 : 종로구 안국동 175-2,102(풍문여고 부지)

□ 사업내용 : 문화집회시설

- 규    모 : 6개동 , 지상3~5층, 10,590.89㎡

□ 공 사 비 : 22,038백만원

□ 용역 기간 : ’16.12. ~ ’17.12.

□ 설계공정률 : 90%

3		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 15명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (3명)	************ ************************* *********** *****	설계경제성 심사 업무 진행 심사결과 종합 결과보고서 작성
VE담당관	▸ 임장경 주무관 계약심사과	심사 총괄 및 결과보고서 정리
팀 원 (4명)	************* ************************ ************************** ************************** ************************	정보 분석, 검토, 아이디어 제안, 발표, 평가, 보고서 작성 등
발주부서 및 설계자	▸ 발주담당 이수호 주무관 도시기반시설본부 ▸ 설 계 자 김종숙 이사 행림건축	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 검토회의 세부일정

일 시	내 용
’17.8.03(목) 14:00~18:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실, 현장방문
’17.8.09(수) 10:00~18:00	- 1차 검토회의 : 기능분석, 아이디어 제시 ‣ 장소 : 도시기반시설본부 지정회의실
’17.8.10(목) 10:00~18:00	- 2차 검토회의 : 대안 구체화 및 분석 ‣ 장소 : 도시기반시설본부 지정회의실
’17.8.16(수) 10:00~14:00	- 최종 검토회의 : 제안 이행․채택회의 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실

□ 설계경제성 심사 시행절차

구분		추진 일정		검토 절차		업무 내용
계획수립		’17. 7. 13		설계경제성 심사 신청 (발주기관)		▸심사 신청서 접수
		’17. 7. 26		설계경제성 심사 계획수립 (VE 담당관)		▸추진일정, 시행방법 등 ▸설계VE팀 구성
설계경제성심사		’17. 8.03 ~ 8. 16(10일)		설계경제성 검토회의 (VE 전담팀)		▸자료 사전검토 ▸현장 확인 - 사업설명(설계자) ▸1,2차 검토회의 - 아이디어제시, 결과이행 회의 ▸최종 검토회의 : 의사결정
		’17. 8. 17		제안 채택결과서 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸채택 검토회의 결과서 통보
		’17. 8. 17 ~ 8. 24(5일)		심사 결과보고서 작성 (계약심사과)		▸설계경제성 최종 결과보고서 작성 및 검토
		’17. 8. 24		심사결과 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸심사결과 통보

4		소요예산

□ 소요예산 : 10,530천원

○ 외부전문가 수당 : 10,030천원

— 리더(기술사+보고서작성)   : 2,620천원(2,620천원 × 1명)

— 위원(기술사)                : 5,384천원(1,346천원 × 4명)

— 퍼실리테이터(중급기술자) : 2,026천원(1,013천원 × 2명)

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 예산과목

○ 발주부서(도시기반시설본부)에서 위원수당 지급

5		향후계획

□ 설계경제성 심사결과 통보  ---------------- ’17.8.24

붙   임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문. 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.