				★ ◎
문서번호	택지조성부-400			부 원			택지조성부장				택지조성처장
보존기간	20년											01/23
				김유수			박영욱				박광균
결재일자	2018.01.23
공개여부	공개			협조	부 원			추혁주
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
오금지구 외 우수처리계획 반영
		서울주택도시공사
(택지사업본부 택지조성부)

오금지구 외 우수처리계획 반영

오금 공공주택지구 조성공사와 관련, 지구계 완충녹지 조성(성토)에 따른 지구 외 주택지 우수처리 방안에 대하여 아래와 같이 조치하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

◦ 공 사 명 : 오금 공공주택지구 조성공사
◦ 위    치 : 서울시 송파구 오금동 일원
◦ 공사기간 : 2013.12.20. ~ 2018.01.31
◦ 도 급 자 : ㈜서우건영
◦ 도 급 비 : 7,780백만원

Ⅱ		관 련 근 거

◦ 2017.09.18. : 실정보고(우수공-수해민원처리)[서우-오금-54호]

Ⅲ		현황 및 검토의견

◦ 오금지구 완충녹지 구간은 성토구간으로, 완충녹지 성토로 인하여 토공레벨과 지구외 93-1번지 (성원빌딩) 배수라인 레벨 차이가 발생하였으며, 우기시 완충녹지내 우수가 민원인 건물로 역류함

◦ 이에 따라 완충녹지내 집수정과 맨홀을 설치하고 기존 우수맨홀과 연결시켜 우수를 배제함이 타당할 것으로 판단됨

※ 민원발생 위치도

※ 처리계획 : 기존 우수맨홀 연결

기존 우수맨홀

Ⅳ		검토내역

수량검토

구분	단위	수량	비고
관로부설	m	40	붙임도면 참조
집수정	개소	1
원형맨홀	개소	1

단가검토

◦ 신규비목 : 신규단가에 계약낙찰율 적용(85.417%)

◦ 기술심사(단가심사) 완료

- 심사결과 : 조정없음

- 관련근거 : 계약심사부-3371호(2017.12.18.)

소요예산                                                (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비	-	3,446	3,446
간접공사비	-	907	907
부가가치세	-	435	435
도급액	-	4,788	4,788

Ⅴ		조 치 계 획

◦ 상기 검토내용에 대하여 추후 설계 변경시 정산 ․ 반영코자 함.

붙임  1. 기술심사 검토결과 알림 (오금 공공주택지구 조성공사)

2. 내역서(수해복구공).  끝.