	관악소방서
수신	난곡119안전센터장
(경유)
제목	신림~봉천터널 공사에 따른 소방용수시설 이설 기간 연장 알림

1. 관련근거

가. ㈜대부건설-2017-0911(2017.9.11.)호 『신림~봉천 터널(도로)공사 중 소화전 이설』

나. 난곡119안전센터-4523(2017.9.13.)호 『신림~봉천터널 공사에 따른 지하식 소화전 이설 예정지 파악보고』

다. 재난관리과-6790(2017.9.20.)호 『신림~봉천터널 공사에 따른 지하식 소화전 이설 요청에 대한 회신』

라. ㈜대부건설-2018-0125(2018.1.25.)호 『소방용수시설 이설 연장 신청서』

2. 신림~봉천 터널 공사에 따른 소방용수시설 이설 공사 연장 신청이 있어 다음과 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 내     용

용수번호	위 치	이설예정지	예정 이설기한	비 고
09-62 (지하식)	미성동 1569-16	난우10길 18 (신림동599-17)	2017. 12월 한 → 연장 2018. 3월경	2017. 12. 12 임시폐전

나. 공사관계자 : *********************************************

붙 임  소방용수시설 이설 연장 신청서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이대영		대응총괄팀장	조동열		재난관리과장	01/25 주병식
협조자
시행	재난관리과-617	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 (봉천동)관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송	02-874-8119	/		/	부분공개(5)