문서번호	역사문화재과-1392
결재일자	2018.1.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	역사문화재정책팀장	역사문화재과장
유지현	양지호	01/25 정영준

북촌 교육전시장 진열장 제작 및 설치

준공기한 연기 계획

2018. 1.

문화본부

(역사문화재과)

북촌 교육전시장 진열장 제작 및 설치 준공기한 연기 계획

서울시 무형문화재 북촌 교육전시장 보수공사에 따른 진열장 제작과 관련하여 완성도 높은 제작 및 설치를 위해 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		사업명

○ 계약건명 : 서울시 무형문화재 북촌 교육전시장 진열장 제작 및 설치

○ 계약업체 : 씨원에스(대표 : 최원영)

○ 계약금액 : 금15,010,000천원(부가세 포함)

○ 계약기간 : 2017.12.12. ~ 2018.2.1.

○ 계약방법 : 수의계약

Ⅱ		변경사항

○ 변경사항 : 준공기한 연기(※계약금액 변동 없음)

당초	변경후
2017.12.12.~2018.2.1.	2017.12.12.~2018.2.9.

○ 연기사유 : 실내 건축 공사 등의 준공기한이 연기되어(‘17.12.9.→’18.1.31) 내부 설치 예정인 진열장의 제작 및 설치 연기가 필요함

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		향후 일정

○ ‘18. 1. : 준공기한 연기의뢰(재무과)

○ ‘18. 2. : 설치 및 제작 완료.  끝.