등록번호

일자리경제과-4927

★주무관

일자리정책팀장

일자리경제과장

경제재정국장

등록일자

2018.1.24.

김미중

김상식

오면숙

01/25

박홍표

결재일자

2018.1.25.

공개구분

대시민공개

협  조

서대문50플러스센터 및 신지식산업센터

리모델링 공정회의(2차) 결과 보고

서 대 문 구

일자리경제과

서대문50플러스센터 및 신지식산업센터

리모델링 공정회의 결과 보고(2차)

□ 회의개요

○ 일    시: 2018. 1. 24.(수) 10:00 ~ 11:00

○ 장    소: 신지식산업센터 3층 305호

○ 참    석: 16명

- 구청(6): 일자리정책팀장, 일자리경제과 주무관(2), 건축과 주무관(3)

- 50플러스센터(7): 건축사사무소 아크21 대표, 임원개발 대표, 소장,                    태림전력 대표, 소장, 코마정보통신 소장, 원앤원                    산업개발 대표

- 신지식산업센터(3): 동북건영 대표, 도시관리공단 시설관리 팀장, 차장

□ 회의결과

○ 민원 발생 최소화 협조 요청

- 2층 철거공사 시 발생한 먼지로 인해 입주자들의 민원 발생

- 공사 진행 시 입주자들에게 공지할 수 있도록 세부 공정표(1주일 단위) 제출

- 먼지가 입주사무실로 들어가지 않도록 방지시설 설치 등 세심한 배려 필요

○ 전기분야 철거를 위하여 기계실 철거 진행 요청

- 태림전력: 기계실로 들어가는 전기를 철거해야 다음 공정을 진행할 수 있음. 기계실 운영 중단 바람

☞ 2층 입주사무실 난방장치를 설치해야 기계실 운영을 멈출 수 있음. 이번 주 말까지 입주사무실 온풍기 설치 예정이므로 다음주에 기계실 철거 진행

○ 천장 전기선 등 각종 배관 철거 문제

- 건축감리: 천장에 생각보다 많은 선들이 있음. 특히 전기선은 도면대로            철거할 것인지, 도면을 변경해야 하는지 검토해야 함

☞ 태림전력: 도면대로 철거 가능

☞ 소방감독: 소방시설은 철거 불가능. 정리만 할 것임

○ 화장실 철거 진행

- 건축감리: 2층과 3층 화장실 철거는 입주자 불편이 따르므로 순차적            으로 진행 바람

☞ 임원개발: 화장실이 2층에 2개, 3층에 2개가 있는데, 배관이 연결  되어 있는 2층, 3층 각 1개씩을 동시에 공사해야 함. 입주자 대표와도 협의하였음.

○ 폐기물 배출 지연으로 인한 철거공사 지연

- 임원개발: 폐기물 배출 문제로 공사 중단상태임. 첫 번째는 폐기물 배출장소 확보에 어려움이 있고, 폐기물 물량이 내역서보다 많아 폐기물처리업체에서 처리가 곤란하다고 함

☞ 폐기물 배출 장소는 유진아파트 주차장 6면을 사용하기로 아파트  대표와 협의하였음. 내역서 보다 많이 발생한 폐기물은 설계 변경을 통하여 물량을 추가로 잡을 예정이니, 현재 발생한 폐기물은 배출을 서두르기 바람

붙임  공사일정표(2018. 1. 24.~1. 31.)