리모델링 공사 일정

기 간	시 간	내 역	비 고
1. 24.(수)	08:00~17:00	○ 2층 입주자 통로 샌드위치 판넬 설치 ○ 폐기물 반출 준비작업	임원개발
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 통신 트레이, 단자함 철거	코마정보통신
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 스틸파이프 철거	태림전력
1. 25.(목)	08:00~17:00	○ 가구류 등 폐기물품 이동 정리 (2층 서측 외부) ○ 50플러스센터 폐기물 반출 준비작업	임원개발
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 통신 트레이, 단자함 철거	코마정보통신
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 스틸파이프 철거	태림전력
1. 26.(금)	05:00~07:00	○ 가구류 등 내부 폐기물품 처리	임원개발, 서부환경
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 폐기물 반출	임원개발
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 통신 트레이 철거	코마정보통신
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 소방 배관 및 배선 철거	태영이엔티
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 스틸파이프 철거	태림전력
		○ 201호/202호 온풍기 설치	세부 일정 미정
1. 27.(토)	08:00~17:00	○ 50플러스센터 폐기물 반출	임원개발
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 통신 트레이 철거	코마정보통신
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 소방 배관 및 배선 철거	태영이엔티
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 스틸파이프 철거	태림전력
1. 28.(일)	08:00~17:00	○ 50플러스센터 폐기물 반출	임원개발
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 통신 트레이 철거	코마정보통신
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 스틸파이프 철거	태림전력
1. 29.(월)	08:00~17:00	○ 기계실 2, 3번 보일러 철거 ○ 50플러스센터 폐기물 반출	임원개발
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 통신 트레이 철거	코마정보통신
	08:00~17:00	○ 3층(휴게실, 환경지킴이방), 2층(공단사무실, 상공회) 에어컨 7대 철거	동북건영
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 스틸파이프 철거	태림전력
1. 30.(화)	08:00~17:00	○ 기계실, 화장실 철거 ○ 폐기물 반출	코마정보통신
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 통신 트레이 철거	코마정보통신
	08:00~17:00	○ 에어컨 7대 수거	서부환경
	08:00~17:00	○ MDF실 가설판넬 설치 ○ 기계실 판넬 철거	태림전력
1. 31.(수)	08:00~17:00	○ 기계실, 화장실 철거 ○ 폐기물 반출	코마정보통신
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 통신 트레이 철거	코마정보통신
	08:00~17:00	○ 50플러스센터 케이블 트레이 설치	태림전력