문서번호	자연생태과-1543
결재일자	2018.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		산림이용팀장	자연생태과장
협조

북한산 산사길 탐방로 정비 추진계획

2018.  1

푸 른 도 시 국

(자연생태과)

북한산 산사길 탐방로 정비 추진계획

북한산 청학사, 여래사 등 산사를 연결하는 탐방로를 정비하여
역사‧문화자원의 효과적인 체험 및 지속가능한 이용 도모

□ 추진근거

❍ 자연환경보전법 제38조(자연환경보전‧이용시설의 설치‧운영)

❍ 환경부 기획재정담당관-3877(2017.12.12.)

□ 추진실적

❍ 사 업 명 : 북한산 산사길 탐방로 조성

❍ 위    치 : 북한산 봉국사 ~ 청학사

❍ 규    모 : 탐방로 2.5km

❍ 추진내용 : 노면정비, 안내체계 구축, 수목식재 등

❍ 기    간 : 2014.12. ~ 2015. 6.

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(국비500, 시비500)

	위치도	데크길 조성	청학사(사찰)

□ 2018년도 추진계획

❍ 추진방향

- 역사문화자원을 효율적으로 탐방할수 있는 도보 중심의 길로 정비

- 역사, 문화자원에 대한 탐방해설판, 이정표 등 안내시설 보완

- 주변 생태계 및 경관 훼손을 최소화하고 수목식재 등 생태계 복원

❍ 사업개요

- 위    치 : 북한산 여래사 ~ 청학사

- 규    모 : 0.3km

- 사업내용 : 탐방로 정비, 안내판 구축, 수목식재 등

- 사 업 비 : 200백만원(국비100. 시비100)

❍ 추진일정

- 2018. 1 ~     : 추진계획 수립(시달)

- 2018. 2 ~ 5.  : 설계용역 시행(설계심의 등)

- 2018. 5 ~ 11. : 공사시행, 준공

□ 행정사항

❍ 착(준)공보고 절차 이행(성북구 ⇒ 시 자연생태과)

- 설계용역, 시설공사 착(준)공일로부터 10일이내(붙임 양식 참고）

❍ 기타 준수사항

- 국가생태문화탐방로 조성‧운영 가이드라인(환경부) 준수

붙임 : 준공보고서 서식1부(별첨).  끝.