문서번호	도시철도토목부-1208
결재일자	2018.1.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목2과장	도시철도토목부장
유원하		방영복	01/30 이도헌
협 조	건축공사과장			이병희
	시설전기과장			이덕한
	설비공사과장			황영일
	주무관			김광기
	주무관			이병일
	주무관			허웅
	주무관			안태현

922공구 937정거장 #1출입구 및 환기구 등 변경에 따른』

설계변경자문 소위원회 개최계획

2018. 1.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『922공구 937정거장 #1출입구 및 환기구 등 변경에 따른』

설계변경자문 소위원회 개최계획

「지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사」추진 중 #1출입구 및 환기구의 위치이동과 환기구 규모축소로 물량변경에 따른 설계변경자문 소위원회를 개최하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 설계변경 자문회의 운영 개선 : 본부장 방침(토목부-23478, ‘13.12.17)

□ 설계변경 자문회의 운영기준 개선 : 주요 현안사항 보고(시장 보고, ‘15.03.02)

□ 자문대상

○ 설계변경자문위원회 운영 기준 제9조 제2항

1. 안건별 증․감액이 5천만원 이상인 공사로서 “사업계획변경조정위원회” 심의대상에서 제외된 안건

2. 주요 핵심공종이 변경된 안건은 금액에 관계없이 요청가능

3. 단순 물량(수량) 변동사항으로 단가 및 공종변경 없이 5천만원 이상 증․감한 안건

4. 위원장이 필요하다고 요구한 안건

□  자문내용 : 설계변경 사유의 적정성

단가적용 및 변경물량의 적정성

변경되는 공법의 적정성 등

Ⅱ		설계변경자문 소위원회 개최

□ 일    시 : 2018. 2. 2(금) 14:00

□ 장    소 : 도시기반시설본부 10층 회의실

□ 자문안건 : 937정거장 #1출입구, 환기구 등 이동 및 환기구 규모조정에 따른 설계변경

□ 소위원회 구성 : 총 11명

○ 위원장 : 궤도과장

○ 위  원

구 분	계	토목	건축	기계	전기	비 고
외 부	4	1	1	1	1
내 부	6	직원 5				간사 1

Ⅲ		행정사항

□ 설계변경자문소위원회 안건은 책임감리원이 설명

□ 외부 자문위원 수당지급(계좌 입금)

○ 소요예산액 : 600,000원(150,000원 × 4인)

※ 산출내역 : 1인당 15만원

․참가수당 10만원(기본)+5만원(2시간 초과)

□ 예산과목 : 도시기반시설본부,도시철도건설,도시철도건설사업,도시철도9호선3단계건설,시설비및부대비,시설부대비

붙 임  1. 설계변경 소위원회 자문요청서 1부.

2. 설계변경 소위원회 자문요약서 1부.

3. 설계변경자문 소위원회 위원명단 1부.

4. 설계변경자문 소위원회 의견서(양식) 1부.  끝.