의  결  안

제 2018-2회 위 원 회
년 월 일	2018년 02월 08일	의안번호	제1,2호
의 제	내곡지구 내 여의천 인도교 설치공사 검토 외 1건

1. 제안부서 : 택지사업본부 택지조성부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

○ 의안 제1호 -「내곡지구 내 여의천 인도교 설치공사 검토」
내곡지구 내 여의천 내 인도교 설치 요청 민원 및 관리청 요청에 따라 인도교 설치공사에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 328,872천원(부가세 및 지급자재비(26,325천원) 포함)

○ 의안 제2호 -「내곡지구 내 신원천 교량 하부 산책로 조성 공사 검토」
내곡지구 내 신원천 좌안 신원1교 부근 둑마루 산책로 연결 동선 단절 개선 요청 민원 및 관리청 요청에 따라 신원1교 하부 산책로 조성 공사에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 303.393천원(부가세 및 지급자재비(25,753천원) 포함)

※ 총 소요예산 :  632,265천원(제경비, 부가세, 지급자재 포함)

4. 심사․의결사항 : 설계변경 타당성

등 원안가결

※ 의안 제1, 2호의 신규품목에 대하여 계약심사부 기술심사 결과 의견 없음 통보

(계약심사부-3338호(2017.12.13.) 및 246호(2018.01.24.))

제2018-2회 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사․의결 하였음.

2018년  02월  08일

위 원 장 :	택지사업본부	본부장	김 소 겸	□
부위원장 :	택지사업본부	택지계획처장	김 익 성	□
위 원 :	택지사업본부	토목기술부	최 칠 문	□
위 원 :		택지설계부	김 주 완	□
위 원 :		기반시설사업부	노 병 철	□
위 원 :		택지계획부	고 재 영	□
위 원 :	기획경영본부	계약심사부	곽 홍 준	□
위 원 :		재정관리부	장 한 수	□
위 원 :		예산자금부	손 명 호	□

제 2018-2회 위원회 서면 결의서

의  제 : 내곡지구 내 여의천 인도교 설치공사 검토 외 1건

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 내곡지구 내  여의천 인도교 설치공사 검토 외 1건에 대하여 설계변경 타당성 및 비목별 단가적용 적정성 등 원안가결

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 고
위 원 장	김 소 겸
부위원장	김 익 성
위 원	최 칠 문
위 원	김 주 완
위 원	노 병 철
위 원	고 재 영
위 원	곽 홍 준
위 원	장 한 수
위 원	손 명 호

2018년  02월  08일

위  원  장           김  소  겸    □