투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울교통공사사장
(경유)	궤도처
제목	고덕차량기지내 유치선 증설 계획 송부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 궤도처-494호(2018.01.29.)와 관련한 내용입니다.

3. 우리 본부에서 추진 중인『하남선(5호선 연장) 궤도공사(1공구)』의 고덕차량기지내 유치선 증설을 위하여 아래와 같이 시행하고자 하오니 공사가 원활히 추진될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사기간 : 2018.02.27. ~ 04.20.

1) 노반공사 : 표토제거 및 노반다짐 - 3,073㎡

2) 궤도부설 : 0.494km

3) 레일용접 : 32개소

4) 분기기부설 : 50kg,PCT,#8 - 1틀

5) 자재반입 : 레일 - 50kg,L=25m 71개

분기기 - 50kg,PCT,#8 - 1틀

PC침목 - 50kg용 - 763개

레일체결구 - 1,500Set

깬자갈 - 1,190㎥

나. 협조사항

1) 장비지원 : 특수차(모터카, 트로리) 세부사항 붙임 참조

(장비지원에 대한 사용료 : 서울특별시 도시기반시설본부 부담)

2) 운전협의 : 특수차 운행, 작업시간 확보 등

3) 기타사항 : 유선협의

붙임  차량기지내 유치선공사 작업계획서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최경호		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	02/08 이도헌
협조자	주무관	조태현		주무관	김근수
시행	도시철도토목부-1687	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 9층	/
전화	772-7243	/전송	772-7306	/	ckh4815@seoul.go.kr	/	대시민공개