문서번호	설비부-1805
결재일자	2018.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	02/09 권오식
협조

『봉제박물관 건립 정보통신공사』

실정보고 사항 검토보고

2018. 02.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『봉제박물관 건립 정보통신공사』

실정보고 사항 검토보고

『봉제박물관 건립 정보통신공사』의 감독 기관으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 봉제박물관 건립 정보통신공사

□  규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 499㎡

□  공사기간 : 2016.12.15 ~ 2018.02.23

□  공 사 비 : *********

□  감 리 사 : 서울시설공단(공사감독3처)

□  시 공 사 : ********

□  공 정 률 : 95%(CCTV 및 음향 주장비 설치 준비)

2		관련근거

□ 공사감독3처-825(`18.02.02) : 공사 실정보고

3		실정보고 내용

□  실정보고 내용

공 종	현황 및 문제점	검토결과	증감액
핸드홀 설치	·통신맨홀 수공1호로 반영되었으나, 무거운 중량 및 설치공간 협소로 기계장비 반입 불가하여 변경 필요	·맨홀 규격을 강화PVC 맨홀로 변경	감)500천원
시스템 박스	·2층 기획전시실 시스템박스(전기공사 시공분) 4개소 설치되나, 통신공사에는 3개소에 통신 모듈라잭 설치로 반영됨	·시스템박스 1개소에 모듈라잭(배관,배선 포함) 추가 설치 필요	증)450천원
터피기 및 되메우기	·통신맨홀 위치 변경으로 터파기 물량 변경	·시공물량으로 정산	감)110천원
가설 컨테이너	·당초 사무용 컨테이너(3*6m) 1동 반영 되었으나, 설치공간 없어 미설치 함	·해당 물량 삭제	감)2,544천원
<공급가액>			감)2,704천원
<부가세>			감)270천원
<도급공사비>			감)2,904천원

4		보고자 의견

□  위 실정보고 사항은 현장 여건 반영에 따른 사항으로 건설사업관리자의           보고 내용이 적정하므로 승인통보하고 추후 설계변경 시 내역 반영하고자 함.

붙임 : 감독기관(서울시설공단) 관련 공문 1부. 끝.