【서식 1】

체육진흥시설 지원사업 추진현황 보고(총괄)

□ 서울특별시                                                                                                    (2017.12.31현재)

국고 보조 년도 (년차)	사업명	시설규모 (㎡)	사업비 투자 실적 및 계획( (백만원)				사 업 추 진 현 황						사업추진 부진사유
							행정행위	부지확보	기본 및 실시설계	착공일 (예정)	사업진도	준공 예정일	착공까지 지연사유	착공이후 지연사유	대 책
17년도 (4년차)	서대문 다목적 체육관 건립	ㅇ 부지면적 11,326㎡ ㅇ 건축 연면적 444,3.76㎡ ㅇ 건물 층수 지하1, 지상3 ㅇ 주요시설 - 다목적(장애인) 체육관 - 헬스장 - 단전호흡장 등	□ 총사업비 : 11,226				ㅇ지방재정투융자 심사일 - 2011.10. 8 도시계획 결정일 - 2015. 3.19	계획:1,560㎡ 확보:1,560㎡ 확보율:100%	ㅇ용역의뢰일 - 2012.11.21 ㅇ완료일 - 2015.10.30	2016. 2.22	100%	2017.10.16
			ㅇ부지매입비 : 0
			ㅇ시설공사비 : 11,226
			년도	국비		지방비
			소계	3,000		8,226
			‘15년까지	1,200		2,258
			‘16년	1,770		2,697
			‘17년	30		3,271
			‘18년	0		0
			‘19년이후	0		0
16년도 (3년차)	노원 월계문화체육센터 건립	ㅇ 부지면적 11,545㎡ ㅇ 건축 연면적 7,997㎡ ㅇ 건물 층수 지하2, 지상3 ㅇ 주요시설 - 수영장 - 다목적체육관 - 체력단련실 등	□ 총사업비 : 24,230				ㅇ지방재정투융자 심사일 - 2011.10.12 도시계획 결정일 - 2013. 3.21	계획:11,545㎡ 확보:11,545㎡ 확보율:100%	ㅇ용역의뢰일 - 2013. 4. 1 ㅇ완료일 - 2014. 4. 1	2015. 6.12	100%	2017. 7.31
			ㅇ부지매입비 : 1,800
			ㅇ시설공사비 : 22,430
			년도	국비	지방비
			소계	3,000	21,230
			‘15년까지	2,000	14,050
			‘16년	1,000	7,180
			‘17년	0	0
			‘18년	0	0
			‘19년이후	0	0

국고 보조 년도 (년차)	사업명	시설규모 (㎡)	사업비 투자 실적 및 계획( (백만원)				사 업 추 진 현 황						사업추진 부진사유
							행정행위	부지확보	기본 및 실시설계	착공일 (예정)	사업진도	준공 예정일	착공까지 지연사유	착공이후 지연사유	대 책
18년도 (1년차)	자양유수지 복합문화센터(체육관)건립	ㅇ 부지면적 3,500㎡ ㅇ 건축 연면적 1,350㎡ ㅇ 건물 층수 지상3층 ㅇ 주요시설 - 다목적체육관	□ 총사업비 : 6,574				ㅇ지방재정투융자 심사일 - 2015.10.28 - 2017. 5.30 ㅇ도시계획 결정일 - 2017.10.26	계획:3,500㎡ 확보:3,500㎡ 확보율:100%	ㅇ용역의뢰일 - 2016.10. 4 ㅇ완료일 - 2017.12. 7	2018. 3. 2	50% *현 공정 - 기본설계 100% - 실시설계 100% - 공사발주 계약심의중	2019. 8.
			ㅇ부지매입비 : 0
			ㅇ시설공사비 : 6,574
			년도	국비		지방비
			소계	1,013		5,561
			‘15년까지	0		150
			‘16년	0		950
			‘17년	0		4,461
			‘18년	1,013		0
			‘19년이후	0		0
18년도 (1년차)	금천구 다목적문화체육센터 건립	ㅇ 부지면적 2,627㎡ ㅇ 건축 연면적 8,332㎡ ㅇ 건물 층수 지하2, 지상4 ㅇ 주요시설 - 수영장 - 대체육관 - 다목적문화룸 등	□ 총사업비 : 28,700				ㅇ지방재정투융자 심사일 - 2016. 5.31 ㅇ도시계획 결정일 - 2013. 8.22	계획:2,627㎡ 확보:2,627㎡ 확보율:100%	ㅇ용역의뢰일 - 2016.12.28 ㅇ완료일 - 2017. 9.14	2018. 2.	40% *현 공정 - 착공준비중	2019. 8.
			ㅇ부지매입비 : 0
			ㅇ시설공사비 : 28,700
			년도	국비	지방비
			소계	6,000	22,700
			‘15년까지	0	0
			‘16년	0	9,478
			‘17년	1,500	3,006
			‘18년	1,606	1,723
			‘19년이후	2,894	8,493

국고 보조 년도 (년차)	사업명	시설규모 (㎡)	사업비 투자 실적 및 계획( (백만원)			사 업 추 진 현 황						사업추진 부진사유
						행정행위	부지확보	기본 및 실시설계	착공일 (예정)	사업진도	준공 예정일	착공까지 지연사유	착공이후 지연사유	대 책
18년도 (1년차)	구로구 항동 생활체육관 건립	ㅇ 부지면적 1,582㎡ ㅇ 건축 연면적 3,300㎡ ㅇ 건물 층수 지하2, 지상2 ㅇ 주요시설 - 볼링장 - 배드민턴장	□ 총사업비 : 11,234			ㅇ지방재정투융자 심사일 - 2016.11. 7 ㅇ지구계획 확정일 - 2016.12.21	계획:1,582㎡ 확보:1,582㎡ 확보율:100%	ㅇ용역의뢰일 - 2017. 4.14 ㅇ완료(예정)일 - 2018. 3.	2018. 4.	25% *현 공정 - 실시설계 90%	2018.12.
			ㅇ부지매입비 : 0
			ㅇ시설공사비 : 11,234
			년도	국비	지방비
			소계	2,475	8,759
			‘15년까지	0	0
			‘16년	0	0
			‘17년	0	2,030
			‘18년	1,040	2,155
			‘19년이후	1,435	4,574

【서식 2】

체육진흥시설 지원사업 추진현황

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 서대문 다목적체육관 건립

ㅇ 대지위치 : 서울시 서대문구 홍은동 305-3번지 외 1필지(305-4)

ㅇ 사업기간 : 2011. 3월 ~ 2017.10월

ㅇ 총사업비 : 11,226백만원

- 시설사업비 : 11,226백만원(국고 3,000, 지방비 8,226)

- 부지매입비 : 해당없음

ㅇ 시설규모

- 부지면적 11,326㎡

- 건축연면적 444,3.76㎡(지하1층/지상3층)

ㅇ 시설내용

- 다목적(장애인)체육관, 헬스장, 단전호흡장, 다목적실 등

ㅇ 집행현황

(단위 : 백만원)

문화체육관광부		보조사업자(시․군․구 기준)
연도별	국 고 지원액	구분	예산액	전년도 이월액	예산현액	지출액 (집행율)	이월액	불용액	(집행잔액)
계	3,000	계	11,226
		국비	3,000
		지방비	8,226
‘15까지	1,200	계	2,070	1,200	3,270	218	3,052	-	-
		국비	500	700	1,200	0	1,200	-	-
		지방비	1,570	500	2,070	218	1,852	-	-
‘16년	1,770	계	4,467	3,052	7,519	3,670	3,849	-	-
		국비	1,770	1,200	2,970	1,452	1,518	-	-
		지방비	2,697	1,852	4,549	2,218	2,331	-	-
‘17년	30	계	3,301	4,349	7,519	3,670	3,849	-	-
		국비	30	1,518	1,548	1,547	-	-	1
		지방비	3,271	2,331	5,602	5,412	41	-	149
‘18년	-	계	-	41	41
		국비	-	-	-
		지방비	-	41	41

□ 예산 확보 현황 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2015년 까지	2016년	2017년	2018년		2019년 이후	비 고
					기 확보	향후 확보
계	11,226	3,458	4,467	3,301	-	-	-
국 비	3,000	1,200	1,770	30	-	-	-
지방비	8,226	2,258	2,697	3,271	-	-	-

□ 추진 현황

ㅇ 지방재정투자심사(‘11.10월) : 서울시 심사(조건부 : 골프연습장 제외 등)

ㅇ 서울시 건설기술(설계용역발주)심의(‘12. 7월)

ㅇ 건축설계 현상공모 공고(‘12. 8월)

ㅇ 건축설계 현상공모 당선작 선정 및 설계용역 계약 체결(‘12.11월)

ㅇ 공유재산관리계획 서대문구의회 의결(‘14. 7월)

ㅇ 서울시장, 서대문구청장 간 시유지 사용협약 체결(‘14.10월)

ㅇ 서울시의회 시유지 사용 동의(‘14.12월)

ㅇ 백련근린공원조성계획 변경(안) 서울시 도시공원위원회 심의(‘14.12월)

ㅇ 백련근린공원조성계획 결정(변경) 고시(‘15. 3월)

ㅇ 설계용역 완료 및 서울시 건설기술심의(‘15.10월)

ㅇ 건축공사 계약 체결(‘15.12월)

ㅇ 전기·소방·통신공사 계약 체결(‘16. 2월)

ㅇ 감리(건설사업관리)용역 계약체결(‘16. 2월)

ㅇ 공사 착공(‘16. 2월)

ㅇ 기존 건축물 철거 완료(‘16. 4월)

ㅇ 터파기(암파쇄)공사 완료(‘16. 6월)

ㅇ 골조공사 완료(‘16. 11월)

ㅇ 조적공사 완료(’17. 2월)

ㅇ 통신공사 완료(‘17. 3월)

ㅇ 공사 준공 (‘17. 10월)

【서식 2】

체육진흥시설 지원사업 추진현황

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 노원 월계문화체육센터 건립

ㅇ 대지위치 : 서울시 노원구 월계동 산 106-4 등 12필지

ㅇ 사업기간 : 2011. 9. ~ 2017. 7.

ㅇ 총사업비 : 24,230백만원

- 시설사업비 : 22,430백만원(국고 3,000, 지방비 19,430)

- 부지매입비(별도)  1,800백만원

ㅇ 시설규모

- 부지면적 11,545㎡, 건축연면적 7,997㎡,

ㅇ 시설내용

- 수영장, 다목적체육관, 체력단련실, 주차장, 관리실 등

ㅇ 집행현황

(단위 : 백만원)

문화체육관광부		보조사업자(시․군․구 기준)
연도별	국 고 지원액	구분	예산액	전년도 이월액	예산현액	지출액 (집행율)	이월액	불용액	(집행잔액)
계	3,000	계	24,230
		국비	3,000
		지방비	21,230
‘15까지	2,000	계	6,000	6,607	12,607	1,601	11,006	-	-
		국비	1,000	1,000	2,000	291	1,709	-	-
		지방비	5,000	5,607	10,607	1,310	9,297	-	-
‘16년	1,000	계	8,980	11,006	19,986	7,743	12,243	-	-
		국비	1,000	1,709	2,709	425	2,284	-	-
		지방비	7,980	9,297	17,277	7,318	9,959	-	-
‘17년	-	계	-	12,243	12,243	12,243	-	-	-
		국비	-	2,284	2,284	2,284	-	-	-
		지방비	-	9,959	9,959	9,959	-	-	-

□ 예산 확보 현황 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2015년 까지	2016년	2017년	2018년		2019년 이후	비 고
					기 확보	향후 확보
계	24,230	15,250	8,980	-	-	-	-
국 비	3,000	2,000	1,000	-	-	-	-
지방비	21,230	13,250	7,980	-	-	-	-

□ 추진 현황

ㅇ 지방재정 투자심사 통과	2011. 10..12.

ㅇ 도시계획 결정	2013. 3. 21.

ㅇ 설계공모 실시	2013. 4. 01.

ㅇ 공사 착공	2015. 6. 12.

ㅇ 공사 준공	2017. 7. 31.

【서식 2】

체육진흥시설 지원사업 추진현황

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 자양유수지 복합문화센터(체육관) 건립

ㅇ 대지위치 : 서울시 광진구 자양동 594

ㅇ 사업기간 : 2015. 5월 ~ 2019. 8월

ㅇ 총사업비 : 6,574백만원

- 시설사업비 : 6,574백만원(국고 1,013, 지방비 5,561)

- 부지매입비(별도) : 해당사항 없음

ㅇ 시설규모

- 부지면적 3,500㎡, 건축연면적 1,350㎡, 체육관 면적 775.93㎡,

관중석 42.65㎡, 탈의·휴게실 등 별도

ㅇ 시설내용

- 다목적체육관 759㎡(33m×23m), 주차장, 사무실, 휴게실 등

※ 공공도서관(건축연면적 1,650㎡) 별도

ㅇ 집행현황

(단위 : 백만원)

문화체육관광부		보조사업자(시․군․구 기준)
연도별	국 고 지원액	구분	예산액	전년도 이월액	예산현액	지출액 (집행율)	이월액	불용액	(집행잔액)
계	1,013	계	6,574	4,894	5,907	-	-	-	-
		국비	1,013	-	1,013	-	-	-	-
		지방비	5,561	4,894	4,894	-	-	-	-
‘15까지	-	계	150	-	150	18	132	-	-
		국비	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	150	-	150	18	132	-	-
‘16년	-	계	950	132	1,082	176	906	-	-
		국비	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	950	132	1,082	176	906	-	-
‘17년	-	계	4,461	906	5,367	473	4,894	-	-
		국비	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	4,461	906	5,367	473	4,894	-	-
‘18년	1,013	계	1,013	4,894	5,907
		국비	1,013	-	1,013
		지방비	-	4,894	4,894
‘19이후	-	계
		국비
		지방비

□ 예산 확보 현황 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2015년 까지	2016년	2017년	2018년		2019년 이후	비 고
					기 확보	향후 확보
계	6,574	150	950	4,461	1,013	-	-
국 비	1,013	-	-	-	1,013	-	-
지방비	5,561	150	950	4,461	-	-	-

□ 추진 현황 및 계획

ㅇ 기본계획 수립(구청장방침, ‘15. 8. 17.)

ㅇ 지방재정투자심사(‘15. 10월) : 서울특별시 심사(조건부, 2단계 심사)

ㅇ 공공건축 사업계획 사전검토(‘16. 2월 ~ 3월)

: 국가공공지원센터(인공지반 사업비 추가확보 필요)

ㅇ 서울시 계약심사 및 설계용역 제안공모 발주(‘16. 6월)

ㅇ 설계 용역 시행(‘16. 10월 ~’17. 12월) 및 설계경제성 심사(’17. 12월)

ㅇ 구유재산 관리계획 승인(‘16. 12. 16.)

ㅇ 지방재정투자심사(‘17. 5월)

: 서울특별시 2단계 심사(조건부, 사업비 증액 시 구비확보 후 추진)

ㅇ 도시계획시설 결정(‘17. 10. 26.)

ㅇ 현, 계약 심의(‘18. 1월) 진행 중

ㅇ 공사발주(예정)(‘18. 1월) 및 공사 착공(예정)(‘18. 3월)

ㅇ 공사 준공(예정)(‘19. 8월)

ㅇ 사업 실적보고서(준공보고서) 제출(예정)(‘19. 11월)

【서식 2】

체육진흥시설 지원사업 추진현황

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 금천구 문화체육센터 건립

ㅇ 대지위치 : 서울시 금천구 독산동 1148

ㅇ 사업기간 : 2015. 2. ~ 2019. 8.

ㅇ 총사업비 : 28,700백만원

- 시설사업비 : 28,700백만원(국고 6,000 / 지방비 22,700)

- 부지매입비 : 해당사항 없음

ㅇ 시설규모

- 부지면적 2,627㎡, 건축연면적 8,332㎡, 체육시설 면적 2,265.32㎡

ㅇ 시설내용

- 수영장(6레인), 대체육관(1면), 체력단련장, 다목적문화룸(무용실 등 4실), 북카페, 주차장, 사무실 등

ㅇ 집행현황

(단위 : 백만원)

문화체육관광부		보조사업자(시․군․구 기준)
연도별	국 고 지원액	구분	예산액	전년도 이월액	예산현액	지출액 (집행율)	이월액	불용액	(집행잔액)
계	6,000	계	28,700
		국비	6,000
		지방비	22,700
‘16년	-	계	9,478	-	9,478	-	9,444	34	-
		국비	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	9,478	-	9,478	-	9,444	34	-
‘17년	1,500	계	4,506	9,444	13,950	1,189	12,761	-	-
		국비	1,500	-	1,500	-	1,500	-	-
		지방비	3,006	9,444	12,450	1,189	11,261	-	-
‘18년	1,606	계	3,329	12,761	16,090
		국비	1,606	1,500	3,106
		지방비	1,723	11,261	12,984
‘19이후	2,894	계	11,387
		국비	2,894
		지방비	8,493

□ 예산 확보 현황 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2015년 까지	2016년	2017년	2018년		2019년 이후	비 고
					기 확보	향후 확보
계	28,700	-	9,478	4,506	3,329	-	11,387
국 비	6,000	-	-	1,500	1,606	-	2,894
지방비	22,700	-	9,478	3,006	1,723	-	8,493

□ 추진 현황 및 계획

ㅇ 도시계획시설 결정(‘13. 8월)

ㅇ 지방재정투자심사(‘11. 4월)

- 서울시 투자심사(‘15. 8월) : 적정

- 중앙 투자심사(‘16. 5월) : 조건부

․ 구체적 시설 및 인력 운용방안 마련, 센터 건립 후 운영시 구체적인 수익금 처리 및 손실금 확보방안 마련

ㅇ 설계 용역 시행(‘17.1~9월)

ㅇ 부지 기부채납 완료(‘17.1월)

ㅇ 공사 계약(‘17. 10월 ~ ’18. 1월) 및 공사 착공(‘18. 2월)

ㅇ 공사 준공(‘19. 8월)

【서식 2】

체육진흥시설 지원사업 추진현황

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 구로구 항동 생활체육관 건립

ㅇ 대지위치 : 서울시 구로구 항동 161

ㅇ 사업기간 : 2016.12월~2018.12월

ㅇ 총사업비 : 11,234백만원

- 시설사업비 : 11,234백만원(국고 2,475백만원, 지방비 8,759백만원)

ㅇ 시설규모

- 부지면적 1,582㎡, 건축연면적 3,300㎡, 체육시설 면적 2,247㎡

ㅇ 시설내용

- 배드민턴장 5면, 볼링장 12레인, 주차장, 관리실 등

ㅇ 집행현황

문화체육관광부		보조사업자(시․군․구 기준)
연도별	국 고 지원액	구분	예산액	전년도 이월액	예산현액	지출액 (집행율)	이월액	불용액	(집행잔액)
계	2,475	계	11,234
		국비	2,475
		지방비	8,759
‘17년	-	계	2,030	-	2,030	205	1,825	-	-
		국비	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	2,030	-	2,030	205	1,825	-	-
‘18년	1,040	계	3,195	1,825	5,020
		국비	1,040	-	1,040
		지방비	2,155	1,825	3,980
‘19이후	1,435	계	6,009
		국비	1,435
		지방비	4,574

□ 예산 확보 현황 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2015년 까지	2016년	2017년	2018년		2019년 이후	비 고
					기 확보	향후 확보
계	11,234	-	-	2,030	3,195	-	6,009
국 비	2,475	-	-	-	1,040	-	1,435
지방비	8,759	-	-	2,030	2,155	-	4,574

□ 추진 현황 및 계획

- 부지확보 및 건립 추진 계획 수립	: 2015. 5.27.

- 건립 타당성 조사 용역 완료	: 2015. 9.12.

- 서울시 투자심사 심의	: 2016. 7.27.

- 서울시 투자심사 결과를 반영한 건립 계획 수립	: 2016. 8.23.

- 중앙투자심사 심의	: 2016.11. 7.

- 지구계획 확정	: 2016.12.21.

- 중앙투자심사 결과를 반영한 건립 계획 수립	: 2016.11.22.

- 설계공모 발주	: 2016.12.26.

- 자문회의 개최	: 2017. 2.16.

- 설계공모 결과 보고	: 2017. 3.16.

- 실시설계 착수	: 2017. 4.14.

- 장애물 없는 생활환경 예비인증	: 2017.10.24.

- 설계 경제성 심의 통과	: 2017.11.21.

- 도시공원위원회 심의	: 2018. 1월

- 실시설계 완료	: 2018. 3월

- 공사 발주	: 2018. 4월

- 공사 준공	: 2018.12월