동부간선도로 확장공사

□ 동부간선도로 월계1교~의정부시계간 병목구간 해소로 통행시간 단축

□ 서울외곽순환도로와 연계된 간선도로망 구축으로 서울 균형발전 기여

1		사업개요

○ 위    치 : 노원구 월계1교 ～ 의정부시계

○ 규    모 : 폭 4→6차로, 연장 6.85km(서울시 1.4km, 광역도로 5.45km)

- 지하차도 4개소 3,970m(초안산, 도봉, 상도, 장암)

- 옹벽(5,000m) 및 보도육교 1개소(상일) 설치 등

○ 공사기간 : 2007.10.∼2020.12.

○ 총사업비 : 4,866억원(기투자 3,068억원, '18년 496억원, 향후예산 1,302억원)

2		추진현황

(공정률 : 현재 47.6%/ ‘18년 목표 62%)

○ 공  통

- '04.04.16 : 광역도로지정(5.45km, 국토해양부)

- '04.09.01~'07.08.17 : 기본 및 실시설계

- '07.10.17 : 1공구 공사착공(서울시 구간, 1.4km)

- '08.02.15 : 3공구 공사착공(광역구간, 2.25km)

- '08.12.30 : 2공구 공사착공(광역구간, 3.20km)

- '13.9.10/11 : 노원, 도봉구 현장시장실 운영(도봉지하차도 연장 및 방음벽 형식 변경)

- '15.07.23 : 사업계획변경조정위원회 심의 가결(도봉지하차도 연장 및 방음벽 형식 변경)

○ 1공구

- 녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 착수(‘17.9.25), 7월 개통 예정

- 학여울 청구아파트 방음벽 공사(3월 착수), 지장물 이설 협의 중

○ 2공구

- 도봉지하차도(총연장 2,990m) 1,515m 완료

○ 3공구

- 상도 지하차도 서울방면(‘17.1월) 및 노원 진입램프 개통 완료(‘17.4월)

- 장암 지하차도 및 구간별 방음벽 공사 중

3		향후계획

○ 공 통

- '18.01~03. : 총사업비조정 관련 사업계획 적정성 재검토(기획재정부)

○ 1공구

- '18.07. : 녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 완료

- '18.09. : 노원구 학여울 청구아파트 방음벽 공사(803m)

- '19.01. ~ '20.12. : 초안산지하차도공사 등 개통예정

○ 2공구

- '18.01. ~ : 도봉지하차도 추가 연장구간 공사 계속(잔여 1,475m)

- '20.12. : 전 구간 개통 예정

조감도
현장사진 (창동 교차로)
현장사진 (도봉 지하차도)

○ 3공구

- '18.06. : 장암지하차도 개통 완료

- '18.12. : 단계별 방음벽 설치 완료(현대 및 상록수 아파트 앞 499m)

- '19.12. : 수락고가(190m) 및 은빛아파트(304m) 방음벽 설치 완료

- '20.12. : 차로조정구간 공사 및 사업 준공

방음벽 조감도

※ 전체 공사구간 위치도 및 조감도