문서번호	도로시설과-2073
결재일자	2018.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전용도로팀장	도로시설과장
서혜지		윤병헌	02/22 이철
협 조
	기전시설팀장			김호성
	시설기술팀장			김흥근
	주무관			배광희
	주무관			김훈겸

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 도로 및 전기시설물』

인수․인계 추진계획 보고

2018.02

안전총괄본부

(도로시설과)

「도시고속도로 연결램프(정릉길) 도로 및 기전시설」

인수·인계 추진 계획 보고

「도시고속도로 연결램프(정릉길)」 램프구간 도로 및 전기시설물 인수·인계 요청이 있어 아래와 같이 시설물을 인수받아 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사

○ 위    치 : 성북구 정릉동 국민대 건너편

○ 규    모 : 사업구간 L=533m, B=5~6m

- 서울시 관리구간 L=272.6m(U-Type 옹벽 70.6m, 연결램프 202m)

○ 사업기간/사업비 : 2013.12.~2017.12. / 137억원

○ 시 행 청 : 도시기반시설본부 토목부

○ 위치도 및 조감도

위 치 도	조 감 도

□ 추진경위

○ '13. 12. 30. : 정릉길 연결램프 설치공사 착공

○ '17. 10. 30. : 예비 준공 검사

○ '17. 12. 21. : 공사 준공

○ '18. 01. 10. : 인수인계 합동점검

○ '18. 01. 24. : 인수인계 서류 제출(도시기반시설본부→도로시설과)

○ '18. 02. 08. : 합동점검 지적사항 조치완료(도시기반시설본부→도로시설과)

□ 인수시설현황

○ 인수/인계 : 안전총괄본부 도로시설과/도시기반시설본부 토목부

○ 시설물 현황 : 램프 교량, 옹벽 등 시설물(붙임1)

시 설 구 분	규 격	세 부 내 역	비고
램프 교량	202m	신축이음장치, 교량받침, 포장, 방음벽, 배수시설 등
U-type 옹벽	70.6m	방호벽, 방음벽, 배수시설 등
기타	-	V.M.S, V.D.S, 교통안전표지, 도로표지, 충격흡수시설 등	인수목록추가

□ 검토의견

○ 합동점검 시 지적사항이 조치 완료됨에 따라 인수인계 절차를 진행하여 관리공백을 방지하고, 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

주요 지적사항	조치	미조치	비고
‣ 배수구와 포장면 단차	O
‣ 도로부속시설물(시선유도봉, 방음판 등) 파손	O
‣ 도막 및 피복 두께 부족	O
‣ 신축이음부 누수	O
‣ 차선 도색 미흡	O

○ 인수 대상시설물 목록 추가(충격흡수시설, 도로표지 등)에 따른 하자보증서 및 공급원 승인서 추가 요청

□ 향후계획

○ '18. 02.   : 인수인계 시행 보고 및 인수인계 실시

○ '18. 02.~ : 자동차전용도로 시설물 관리 시행(서울시설공단)

붙 임   1. 인수 대상시설물 목록 1부.

2. 시설물 인수인계 요청 공문 1부.  끝.