문서번호	도시철도설비부-1888
결재일자	2018.2.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
김동일		구봉서	02/23 구자훈
협 조
	토목1과장			윤방식
	설비공사과장			황영일
	차량과장			강치석
	송변전과장			서태창

9호선 연장건설(3단계) 개통대비신호시험 단축방안 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1.

도시철도설비부

(신호과)

9호선 연장건설(3단계) 개통대비 신호시험 단축방안 보고

9호선 연장건설(3단계)의 정상적인 개통을 위해 각종 시험 시 돌발상황에 대비하고자 신호시험 단축방안에 대한 보고를 드림

Ⅰ		시험개요

❍ (시 험 명) 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 열차신호시험

❍ (시험구간) 서울시 잠실종합운동장 ~ 둔촌동 보훈병원

❍ (본    선) 9.14km (시점 ~ 종점 : 32k390 ~ 41k530)

❍ (정 거 장) 8개소(931 ~ 938정거장)

* 신호기계실 : 931, 934, 938정거장

Ⅱ		주요신호시험

□ TDC시험

❍ 시험항목 : 931, 934, 938제어권역별 비콘, 선로변 설비 등 위치 검측

❍ 시험기간

- (당초) ’17.12.18. ~ ’18.02.28. ⇒ (변경)’17.12.18. ~ ’18.02.23.

□ 저속시험

❍ 시험항목 : 정위치정차, MTIB 비콘 초기화 작업 등 18개 항목

❍ 시험기간

- (당초) 3.02. ~ 4.13. ⇒ (변경) 2.26. ~ 3.30.

※ 시험시간  09:00～18:00 → 08:00～18:00 (1시간 조기 시작)

□ 연결시험

❍ 시험항목 : 9호선 2단계와 3단계간 절체시험

❍ 시험기간 : 3.31.~4.01.

□ 고속시험

❍ 시험항목 : 전체운행검사 등 6개 항목

❍ 시험기간

- (당초) 4.16. ~ 5.11. ⇒ (변경) 4.02. ~ 4.30.

※ 시험시간  09:00～18:00 → 08:00～18:00 (1시간 조기 시작)

Ⅲ		행정사항

❍ (조기시험 시행일자) 3.5.(월)부터 4.30까지 실시

❍ (운영사) 조기 시험에 따른 기관사 및 차량지원 협의 완료

❍ (본부) 근무자 조기출근

❍ (PSD) 출입문 안전요원 근무협조

❍ (기타) 공구별 안전요원 협의 완료, 기타 근무자 근무협조

❍ 안전사고 예방을 위한 담당별 근무체계 철저