등록번호

교통행정과-12545

주무관

교통시설팀장

교통행정과장

안전건설국장

등록일자

2018.2.22.

김경수

변혜경

정미선

전결 02/23

장운기

결재일자

2018.2.23.

공개구분

대시민공개

협조

조경팀장

홍순철

행정민원팀장

강정구

장충체육관앞 교통소통개선공사 주민설명회 개최 계획

안전건설국

교통행정과

장충체육관앞 교통개선공사 주민설명회 개최 계획

장충체육관앞 사거리 교통소통 및 보행자의 편의 등 교통환경을 개선하고자 시행중인 ‘장충체육관앞 도로교통소통 개선공사’ 착공 전 주민설명회 개최 등 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 장충체육관앞 도로교통소통 개선공사

□ 위    치 : 장충체육관앞 교차로 주변

□ 공사기간 : ’17.12.26. ~ ’18.5.24.

□ 공사내용

- 횡단보도 신설에 따른 도로구조 개선 : 장충교회앞 교통섬 이설

- 보도 부분확폭(2개소) : 신라호텔 진입로 주변 보도구간

※ 횡단보도 신설, 신호등 이설, 차선도색 : 서부도로사업소

□ 공사규모

- 아스팔트 포장 : 2.8a, 경계석설치 : 335m, 측구설치 : 138m

- 보도포장 : 3.3a, 그루빙 설치 : 1a 등

□ 계약금액 : 102,773천원(시비, 사고이월)

□ 도 급 자 : 제니스건설산업(주) 대표 차영남

Ⅱ		세부 추진계획

□ 연계공사 담당자 공정회의

- 일    시 : 2018. 2. 26(월) 13시 ~ 14시

- 장    소 : 중구청 7층 대강당

- 참석대상 : 연계공사 담당자, 시공사, 중부경찰서 교통관리과

･ 공사담당 : 교통행정과, 공원녹지과, 서부도로사업소 도로보수과･기전과 담당

･ 공사관계자 : 시공사, 설계사

･ 협조기관 : 중부경찰서 교통관리과

- 주요내용 : ‘장충체육관앞 도로교통소통개선공사’, ‘녹지광장 조성사업’, 신호등 이설, 도로표지 및 횡단보도, 교통안전시설 설치 등 유관기관 협조사항 및 공사 추진일정 조정

- 진행순서

주 요 내 용	보고자	비 고
‘도로교통소통개선공사’ 공사개요 및 공사추진 일정 설명(10“)	교통행정과 담당
‘녹지광장 조성사업’ 공사개요 및 공사추진 일정 설명(10“)	공원녹지과 담당
신호등 이설 및 노면표지 설치공사	서부도로사업소 신호등, 노면표지 담당
교통안전시설 및 교통처리대책	중부경찰서 시설반장

□ 주민설명회 개최

- 일    시 : 2018. 2. 26(월) 16시 ~ 16시 40분

- 장    소 : 장충동 태극당 2층

- 참석인원 : 연계공사 관계자, 중부경찰서, 지역주민 등 약 30명

･ 공사설명 : 교통행정과, 공원녹지과

･ 공사관계자 : 시공사, 설계사 등

･ 지역주민 : 주민대표 및 지역 거주주민 등

･ 장충동 주민자치센터 담당 직원

- 주요내용 : ‘장충체육관앞 도로교통소통개선공사’, ‘녹지광장 조성사업’ 사업내용 및 공사협조 당부사항

- 진행순서

주 요 내 용	보고자	비 고
‘도로교통소통개선공사’ 공사개요 및 공사추진 일정 설명(10“)	교통행정과 시설팀장
‘녹지광장 조성사업’ 공사개요 및 공사추진 일정 설명(10“)	공원녹지과 조경팀장
질의응답 및 의견 청취(20“)

- 요구사항 조치 : 반영 가능여부 검토 후 처리

Ⅲ		향후 추진계획

□ 2. 27. ~ 3.  5 : 공사 안내간판 설치, 자재반입 등 공사준비

□ 3.  6. ~ 3. 15 : 장충교회앞 교통섬 철거, 신호등 및 수목이설

□ 3. 16. ~ 3. 24 : 우회도로 포장

□ 3. 25. ~ 4. 10 : 교통섬 설치, 보도포장

□ 4. 11. ~ 4. 22 : 횡단보도 설치 및 차선도색

□ 4. 30.            : 공사준공.  끝.