교통행정과장 정미선 (☎*************) / 교통시설팀장 변태경(☎6211) / 담 당 김경수(☎6212)

장충체육관앞 도로교통소통개선공사 추진현황 보고

공사개요

□ 공 사 명 : 장충체육관앞 도로교통소통 개선공사

□ 위    치 : 장충체육관앞 교차로

□ 공사개요

- 도로구조 개선 : 장충교회앞 교통섬 주변(지하철 3, 4번출구 앞)

- 횡단보도 신설(2개소) : 장충교회~신라호텔 진입로, 장충교회~태극당앞

- 보도 부분확폭(2개소) : 신라호텔 진입로

□ 공 사 비 : 118,580천원(시비)

□ 도 급 자 : 제니스건설산업(주) 대표  차 영 남

현장대리인 최원후(☎*************)

추진사항 및 향후계획

□ ’17. 12.26.   : 공사계약

□ 2. 5. ~ 2.14 : 경찰서 및 유관부서 사전협의

□ 2.26.(월)     : 공정회의 및 주민설명회

□ 2.27. ~ 3. 5 : 공사안내간판 설치, 자재반입 등 공사준비

□ 3. 6. ~ 3.15 : 장충교회앞 교통섬 철거, 지장물 이설

□ 3.16. ~ 3.24 : 우회도로 포장

□ 3.25. ~ 4.22 : 교통섬 설치, 보도포장, 차선도색

※ 연계공사 협조

- 남소영 복합문화거리 조성사업(공원녹지과), 장충체육관앞 노면도색공사(서부사업소)

- 장충체육관앞 교차로 녹지광장조성사업(공원녹지과)

작성부서	교통행정과(☎3396-6212)
보 고 일	2018. 02. 22(목)

보 고 자 료

교통행정과장 정미선 (☎*************) / 교통시설팀장 변혜경(☎6211) / 담 당 김경수(☎6212)

위치도 및 현황사진

장충체육관 앞 교차로

공사계획도