문서번호	급수운영과-10140
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		소장
양윤선	김태형	안재엽		05/08 정운진
협 조

2014년 광진구상수도공사

(장기계속단가계약) 발주계획

2014. 5

동부수도사업소

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

광진구 관내 급수공사 추가 발주계획

광진구 관내에서 발생하는 각종 상수도 공사(신설, 구경확대, 수전분리, 인입관정비 등)를 위하여 시행하고 있는 『2013년 광진구 상수도공사2차 (연간단가)』의 시행금액이 2014년 5월 중 계약금액을 초과할 것으로 예상되어 향후 지속적이고 원활한 급수공사 민원처리를 위하여 2014년도 장기계속계약 공사를 발주하고자 함.

Ⅰ		2013년 광진구 상수도공사 2차 현황

○ 공 사 명 : 2013년 광진구 상수도공사 2차(연간단가)

○ 공사개요 : D=13~300㎜, L= 514m

○ 공사기간 : 2014. 1. 6 ~ 2014. 6. 30

○ 도 급 자 : 오에스이엔씨(주) 오미숙

○ 도 급 비 : 192,212,600원

Ⅱ		보고내용

○ 예산집행 현황                                       (단위:천원)

구 분	계약금액	기 집행액	잔액	비 고
도급비	192,212	없음	192,212

○ ‘14년 신축건물에 대한 급수공사 신청 증가로 인하여 5월중          192,212천원의 계약금액의 소진이 예상되고 있음.

Ⅲ		조치의견

○ 광진구 관내 급수공사의 원활한 추진을 위하여 “2014년 광진구 상수도  공사”를 발주하여 급수공사 등으로 인한 시민불편사항 해소 및 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

Ⅳ		추가 발주계획

○ 공 사 명 : 2014년 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사지역 : 광진구 관내

○ 공사개요 : D=13~300㎜, L=2,154m

○ 공사기간 : 계약일 ~ 2015.6.30

○ 2014년 발주 금액(예상 도급액) : 761,142천원

(단위:천원)

구 분	총공사비	도급비	관급비	공사기간
계	961,142	761,142	200,000	계약일∼ 2015.6.30

※ 본청 계약심사 결과에 따라 도급비 변경 가능

Ⅴ		계약방법

○ 관련근거 : 국가를당사자로하는계약에관한법률 제21조(장기계속계약)

○ 입찰방법 : 공개경쟁입찰(긴급)

○ 예정물량 산출

- 총 예정물량은 장기계속계약 절차에 따라 2011~2013년까지 3개년    평균치를 산출하여 전체 설계물량으로 하여 산출함.

○ 예산관련 사항

- 2014년도 집행할 예정량에 대하여는 금년 예산 집행

- 예산과목

․상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

․상수도사업비용,영업비용,배급수비,기타교체비(불용관)

․상수도사업비용,영업비용,배급수비,수도관교체비(교체장애수전)

․자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비

Ⅵ		세부 추진계획

○ 설계서 작성 및 설계심사의뢰 : 2014. 5. 8

○ 공사 계약의뢰 : 2014. 5 .16

○ 공사계약 및 착공 : 2014. 5. 30

Ⅶ		발주 내역서 작성 기준

○ 표준품셈 1-16(품의 할증) 제6항 지세별할증(주택가 할증) 적용

○ 관련근거

- 본청 계약심사과-14187(2013.9.25) 건설공사 원가산출시 주택가     할증 적용기준알림

- 본부 재무회계과-1504(2014.2.5)  2014년도 상수도공사 기본     일위대가표 배포

따로붙임 : 공사 발주내역서 1부. 끝