공 사 설 명 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명 : 화계천 복개구조물 도로정비공사(1구간)

2. 위    치 : 수유로

3. 목    적 : 관내 주요 도로로 이용되고 있는 화계천 복개구조물 상부 아스팔트 포장이 전반적으로 망상균열발생에 따른 노면수 유입으로 인한 구조물 노후가 가속화되므로, 복개구조물 방수 등 도로를 정비하여 편안하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함.

4. 총공사비 : 400,000,000원

- 도 급 비 : 240,600,000원

- 관 급 비 :   64,020,000원

- 이 전 비 :   95,380,000원

5. 공사물량

공 종	규 격	단 위	물 량	비 고
절삭 후 아스팔트 포장	T=5cm	a	63.23
아스콘 기층 포장	T=7.5cm	a	22.49
복개구조물 방수	시트식(NORI)	㎡	2,431
기타 도로정비 등		식	1

6. 본 공사는 우리구 관내 화계천 복개구조물 상부 아스팔트 포장의 노후 및 파손으로 시급히 보수하는 공사로서 설계서 및 시방서 규정대로 시공하여야 한다.

7. 본 공사의 시공자는 항상 긴급 출동 할 수 있는 작업반 및 제반 장비를 확보하여야 한다.

8. 본 공사는 교통통제를 수반하는 도로정비공사로 당일 작업완료 후 주민생활 및 야간통행에 불편이 없도록 가 복구 완료하는 것을 원칙으로 하여야 한다.

9. 본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 있을 때는 설계변경을 할 수 있다.

1) 당초 설계물량의 증·감이 있을 때

2) 시공공법이 변경될 경우

3) 발주처의 형편상 설계변경을 필요로 할 때

4) 단가 변경이 있을 때

- “지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 제22조 및 같은법 시행령 제73조·제74조·제75조에 의거

5) 기타 감독관이 필요하다고 인정할 때

- 설계변경 사유 발생시는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

10. 본 공사 시공 시는 반드시 공사 전·중·후 사진을 공종별로 동일 장소, 동일 방향으로 촬영 준공사진을 1부씩 제출하여야 한다.

11. 참여기술자(기능공 포함) 명단 제출

- 본 공사에 참여하는 업체는 공사 착수전에 시공계획서 제출시 시공에 참여하는 참여기술자(기능공 포함) 명단을 함께 제출하여야 함.

12. 예정공정표

공 종	수량	3월	4월	5월	6월
구 조 물 공	1식
포 장 공	1식
부 대 공	1식