문서번호	도시철도사업부-2211
결재일자	2018.3.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신교통1과장	도시철도사업부장
왕태현		위성환	03/07 박동룡
협조
	주무관		신익현

- 별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사 부지내 -

문화재 정밀발굴조사 용역 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 03.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

- 별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사 부지내 -

문화재 정밀발굴조사 용역 추진계획

별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사 문화재 표본조사 결과, 유적(고려~조선시대 분묘)이 출토되어 공사구간 부지내 문화재 보존을 위해 정밀발굴조사 용역을 시행코자 함.

□ 관련근거

○「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」제14조(발굴된 매장문화재의 보존조치)

□ 추진경위

○ '17.12.01.  : 문화재 표본조사 용역 계약 및 착수

○ '18.02.08.  : 문화재 표본조사 완료

○ '18.02.13. : 표본조사 결과 보고서 제출(본부→문화재청)

○ '18.02.26.  : 조사결과에 따른 보존조치 통보(문화재청 발굴제도과)

⇨ 유적(분묘) 출토 주변 585㎡에 대해 정밀 발굴조사 실시

<표본조사>

￭ 조사기간 : ´18.02.05 ~ 02.08.

￭ 조사기관 : (재)한백문화재연구원

￭ 용 역 비 : 금9,112천원

￭ 조사결과 : 조사면적 2,673㎡에 총 3개소 조사 결과, 3번 트렌치에서                고려~조선시대 분묘 6기 출토

표본조사 위치	3번 트렌치(분묘출토)

□ 정밀발굴조사 추진 계획

○ 용역개요

- 용 역 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 문화재 정밀 발굴조사 용역

- 과업위치 : 강동구 암사동 일원

- 과업내용 : 정밀 발굴조사 A=585㎡

- 용 역 비 : *********

- 과업기간 : ***********

(3번 트렌치 부근)

○ 진행절차

발굴허가 신청 (도기본→문화재청) □ 허가기간 10일	⇨	현장조사 실시 (조사기관) □ 조사기간 20일	⇨	조사결과 작성 및 제출 (도기본→문화재청) □ 제출기간 20일	⇨	조사결과 심의 (문화재청) □ 심의기간 10일

보존조치 통보 (문화재청→도기본) □문화재 有 : 보존조치 □문화재 無 : 공사시행	⇨	보존조치 이행 (도기본) □현장보존, 이전복원, 모형복원 등

○ 발주방법 검토 : 공개경쟁 입찰

-  발굴조사 수행의 공정성 확보 및 조사기관의 입찰 참여 확대

□ 향후 추진계획

○ ‘18.03.09. : 용역 계약심사 의뢰

○ ‘18.03.20. : 정밀 발굴조사 용역 발주

○ ‘18.04.10. : 계약 및 착수

○ ‘18.06.20. : 용역 준공

□ 예산과목

○ 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 광역철도건설사업, 별내선(8호선연장)광역철도건설, 시설비(210-401-01)

붙 임 : 1. 보존조치 통보 공문(문화재청)

2. 조사기관 의견서(표본조사) 1부.

3. 학술자문회의 의견서 1부.

4. 정밀발굴조사 설계내역서 1부.  끝.